□ 2023년도 대전광역시 주요 건설공사현황

□ 대전관내 예산집행현황(대전광역시 및 5개구청, 교육청)

2023. 1. 12

대한건설협회 대전광역시회

2023년도 대전광역시 주요 건설공사 현황

1

□ 하수 및 용수시설 정비

연번	사 업 명	사업개요	사업기간	사업비 (억원)	비고 (공정률)
1	대전1,2산단 하수관로 분류화 사업 등 6개사업진행	관로정비 ㆍ 신설 L=259.42㎞ 배수설비 17,638가구	'17.01.~'26.01.	2,820
2	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업 등 4개사업 설계 및 발주	관로정비 ㆍ 신설 L=142.63㎞ 배수설비 11,416가구	'18.01.~'28.12.	1,771
3	노후 하수관로 보수 2개사업	관내 9개 동 노후관 개량 L=33.4㎞	'17.01.~'23.12.	514
4	평촌산업단지 공업용수도 건설	관로신설 9.9㎞ 배수지·가압장 각 1개소	'18.08.~'24.06.	172
5	도시침수 대응사업	관로신설ㆍ정비 L=18.83km 우수저류시설 1개소	'18.08.~'26.12.	1,201
6	노후관로(1단계 긴급보수)정비	노후하수관 개량 L=19.9km	'17.01.~'23.06.	266	공사 72%
7	대전1,2산단 하수관로 분류화	관로정비 ㆍ 신설 L=42.4㎞ 배수설비정비 1,534개소	'17.01.~'24.12.	456	공사 45%
8	대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비	관로정비 ㆍ 신설 L=48.8㎞ 배수설비정비 4,993개소	'17.01.~'24.04.	498	공사 61%
9	서구 복수동 일원 하수관로 정비	관로정비 ㆍ 신설 L=29.3㎞ 배수설비정비 1,383개소	'18.01.~'23.12.	306	공사 28%
10	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비	관로정비 ㆍ 신설 L=48.5㎞ 배수설비정비 3,139개소	'18.01.~'25.12.	496	공사 25%
11	서구 내동 일원 하수관로 정비	관로정비 ㆍ 신설 L=41.5㎞ 배수설비정비 3,128개소	'18.01.~'26.12.	556	공사 16%
12	대전천 일원 하수관로 정비	관로정비 ㆍ 신설 L=48.9㎞ 배수설비정비 3,465개소	'19.01.~'26.12.	506	공사 8%
13	중구 유천2지역 도시침수 대응	우수관로신설 및 정비6.83㎞	'18.08.~'24.05.	454	공사 15%
14	평촌산업단지 공업용수도 건설	용수관로(D=300∼600) L=9.9㎞ 가압장 및 배수지 각 1개소	'18.08.~'24.06.	172	공사 12%
15	노후관로(3단계 긴급보수)정비	노후하수관 개량 L=13.5km	'19.01.~'23.12.	246	설계 99%
16	동구 용운동 일원 하수관로 정비	관로정비 ㆍ 신설 L=53.03㎞ 배수설비정비 3,824개소	'18.01.~'25.12.	642	설계 100%
17	동구 용전동 일원 하수관로 정비	관로신설 L=37.2㎞ 배수설비정비 3,668개소	'21.01.~'26.12.	421	설계 92%
18	서구 탄방2, 가장2지역 도시침수 대응	우수관로 신설 및 정비 7.4㎞	'19.01.~'24.12.	280	설계 99%
19	서구 둔산1지역 도시침수 대응	노후관로 개량 L=4.6㎞ 우수 저류시설 1개소	'21.01.~'26.12.	465	설계 50%
20	서구 도마,변동 하수관로 정비사업	하수관로정비 L=42.0㎞ 배수설비 3,294가구	'20.01.~'26.12.	508	설계 100%
21	평촌산단 하수처리시설 연계처리관거사업	하수관로 신설 L=10.4㎞ 중계펌프장 1개소	'18.01.~'25.12.	197	설계 100%

□ 도로 기반시설

연번	사 업 명	사업개요	사업기간	사업비(억원)	비고(공정률)
1	서대전IC∼두계3가 도로확장공사	L=5.54km, B=18.5⇒27m	'17.03.~'24.12.	623	공정률 38%
2	외삼∼유성복합터미널 BRT연결도로 건설	L=6.6km, B=40∼50m	'14.05.~'23.12.	1,583	공정률 64%
3	도안대로 도로개설공사	L=1.98km, B=31.4∼50m	'15.09.~'23.12.	1,315	공정률 70%
4	평촌일반산업단지 지원도로 개설공사	L=3.2km, B=10m	'17.01.~'23.11.	377	공정률 38%
5	대덕특구 동측진입로 개설	L=1.3km(교량L=582m포함) B=24m	'19.01.~'26.12.	1,044
6	용수골 ~ 남간정사 도로개설공사	L=540m, B=20m	'19.05.~'25.12.	328	23 하반기 발주·착공
7	정림중 ~ 사정교간 도로개설공사	L=2.4km, B=20m	'19.03.~'26.12.	906	23 하반기 발주·착공
8	용운주공 2단지 주변 도로개설	L=430m, B=20m	'20.01.~'25.12.	267	23 하반기 발주·착공
9	중앙로 신·구 지하상가 연결	L=138.7m, B=13.2m	'16.01.~'23.05.	151	공정률 80%
10	둔곡교차로BRT 중앙정류장 설치공사	신동,둔곡 정류장2개소	'20.11.~'24.03.	89	공정률 4%

□ 녹색 생활환경 조성

연번	사 업 명	사업개요	사업기간	사업비(억원)
1	장동 도시생태축 복원사업 (장동 472-2번지일원)	조성면적 A=47,819㎡ 생태연못,휴게테크 등 생태복원	'22.08.~'23.11.	54
2	장동문화 생활권 공원 조성사업 (장동 470번지일원)	조성면적 A=13,259㎡ 야외무대,황토산책로, 잔디광장 등 공원조성	'22.08.~'23.08.	16
3	장동문화공원 조성사업 (장동 472번지일원)	조성면적 A=24,624㎡ 주차장 276면, 화장실 등 부대시설 조성	'23.04.~'23.12.	21
4	더퍼리근린공원 조성사업 (가양동 12-21번지일원)	조성면적 A=99,750㎡ 상수리 풍욕장,선비의후원 나눔마당, 삼매당 매화원 조성 등	'23.04.~'24.08.	27
5	신안2 역사공원 조성 (신안동 232-4일원)	조성면적 A=13,302㎡ 레일로드, 철도광장, 정원 및 녹지공간 등	'21.11.~'23.08.	36
6	명암 근린공원 조성사업 (정림동 정수원 일원)	조성면적 A=28,970㎡ 체육시설(풋살장),산책로, 편의 및 조경시설 등	'22.07.~'23.04.(2차) '23.04.~'23.12.(3차)	31
7	도시바람길숲 조성사업	도시공원 및 완충녹지 등 그늘목 및 경관수종 등 수목보완	'23.04.~'23.12.	20

□ 문화 및 공공시설 확충

연번	사 업 명	사업개요	사업기간	사업비(억원)	비고
1	제2 시립도서관 건립 (가양도서관 부지)	지하1층∼ 지상3층 연면적 7,354㎡	'20 ~'24.	290	공사추진
2	3.8민주의거 기념관 건립공사(선화동)	지하2층∼ 지상3층 연면적 2,950.9㎡	'20 ~'24.	202	공사추진
3	복합문화체육센터 건립	한밭도서관(문화동) 작은내수변공원(원신흥동) 길치근린공원(비래동)	'21 ~'24.	585	공사추진
4	사회적경제혁신타운 조성사업(가양동)	지하2층∼ 지상4층 연면적 9,527㎡	'20 ~'24.	366	공사추진

대전관내 예산집행현황(대전광역시 및 5개구청, 교육청)

2

《 총  괄  표 》

구 분	2023예산액	2022예산액	증감(△)액	전년대비 (%)	비 고
총 계	946,123,051	758,843,412	187,279,639	24.6%
대전광역시	375,745,375	361,751,864	13,993,511	3.9%
중 구 청	46,723,162	35,129,156	11,594,006	30%
대 덕 구 청	20,052,643	27,592,473	△7,539,830	△27.3%
동 구 청	73,998,022	66,134,797	7,863,225	12%
유 성 구 청	26,416,182	27,219,681	△803,499	△3%
서 구 청	74,107,965	43,351,443	30,756,522	71%	◦도시재생 뉴딜사업 195억 ◦정림자연재해위험지구 개선사업 122억 ⇒사업규모 큰 비중 차지
교 육 청	329,079,702	197,663,998	131,415,704	66.4%	◦그린스마트스쿨 건립사업 증가 *13개교➝20개교 (294억➝944억)

※단일공사 1억원이상 및 총사업비중 시설비만 (토지매입비, 감리비, 부대비용 제외)발췌

◉ 대전광역시

■ 일 반 회 계

(단위:천원)

사 업 부 서	공 사 명	금 액
자연재난과	• 대동천 자연재해 위험 개전지구 정비	4,140,000
산업입지과	• 국제과학벨트 BRT정류장 설치	3,093,000
일자리경제과	• 사회적경제혁신타운 조성(공사비)	4,200,000
과학협력과	• 대덕특구 융합연구혁신센터 조성	1,995,450
노은동수산물 도매시장관리사업소	• 화장실 리모델링 공사 • 양념동 지붕방수 공사	800,000 287,000
문화예술과	• 제2 시립도서관 건립	5,894,132
관광진흥과	• 대청호 생태테마 야간경관길 조성 • 갑천 음악분수 조성	209,000 400,000
대전예술의전당	• 노후 배관 보수 및 교체공사 • 광장 계단 보수공사	300,000 400,000
체육진흥과	• 외삼족구장 시설개선사업 • 베이스볼 드림파크 조성 • 학교시설복합화(대전고) 사업 국민체육센터 건립 • 대전고 내 공공도서관 건립(전환사업2-2)	350,000 38,500,000 400,000 200,000
노인복지과	• 시 노인복지관 시설환경 개선 및 기능보강 • 가족안심 시립요양원 건립 • 명암근린공원 조성사업	700,000 2,728,000 1,300,000
장애인복지과	• 시립산성종합복지관 시설개선공사	374,000
여성가족청소년과	• 평송청소년문화센터 기능보강	317,500
산림녹지과	• 대동 근린공원 • 더퍼리 근린공원 • 무장애나눔길 조성(만인산) • 바람길숲 사업 • 실내정원 및 옥상정원 조성 • 둘레산길 정비 • 빈계산과 수통골 연결 둘레길 조성	1,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000 500,000 693,000
도시공원과	• 장동문화공원 조성 • 더퍼리근린공원 GB생활공원 • 중촌근린공원(3단계) 시설개선 사업 • 대사근린공원 진입도로 시설개선 사업	2,153,000 300,000 1,296,000 2,000,000
생태하천과	• 국가하천 유지보수 • 대전천 하천재해예방사업(전환) • 신동천 하천재해예방사업(전환) • 대전산업단지 완충저류시설 설치 • 대덕테크노밸리 완충저류시설 설치	3,173,000 1,500,000 1,500,000 1,011,000 714,000
공원관리사업소	• 보문난 산책로 및 난간정비 등 • 치유의 숲 시설물 보완공사 • 만인산자연휴양림 보완사업 • 장태산 자연휴양림 정비사업	510,000 300,000 2,800,000 493,000
하천관리사업소	• 하천조경관리사업(유등천1․2, 대전천) • 3대하천 꽃단지 조성관리	940,000 400,000
한밭수목원	• 한밭수목원 조성보완사업	741,000
버스정책과	• 동구 삼정동 시내버스 공영차고지 조성	4,987,000
건설도로과	• 정림중~사정교간 도로개설 • 서대전IC~두계3가 도로확장 • 대덕특구 동측진입로 개설 • 용운주공2단지 주변 도로개설 • 용수골~남간정사 도로개설 • 신탄진휴게소 하이패스IC 설치 • 유성대로 연결도로(2구간) 개설 • 한승미메이드아파트~한우물네거리 인도개설 • 유등천 좌안 자전거보행자 데크설치 • 시설물안전법 1종, 2종(교량, 터널) 보수보강 • 시설물안전법 3종(지하차도) 보수보강	7,410,000 11,807,000 7,190,000 10,000,000 3,151,000 1,509,000 300,000 500,000 3,400,000 4,030,000 1,450,000
철도광역교통과	• 외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설	4,480,000
도시정비과	• 대전역세권 재정비 촉진	25,300,000
합 계		180,126,082

■ 특별회계

(단위:천원)

사 업 부 서	공 사 명	금 액
산업입지과	• 평촌산업단지 하수종말처리시설 연계처리 관거공사 • 평촌일반산업단지 지원도로 개설 • 대전산업단지 재생사업 기반시설(도로공사) • 대전산업단지 활성화구역 및 스마트주차장 조성공사 • 부처연계형 노후산단 개발(주차장)	2,500,000 5,465,000 1,000,000 6,810,000 1,000,000
트램건설과	• 도시철도 2호선 건설	20,343,000
소방본부	• 부사안전센터 공사비	4,600,000
동부소방서	• 산내119안전센터 이전신축	1,700,000
합 계		29,143,000

■ 명시이월사업조서-일반회계

(단위:천원)

사 업 명	2022예산(이월년도)			2023예산(집행년도)
	예산액	집행액	이월요구액	이 월 예 산
청벽산공원사거리~엑스포 아파트 간 도로확장	2,850,000	0	2,850,000	2,850,000
국제과학벨트 BRT정류장 설치공사	4,587,000	1,257,000	3,330,000	3,330,000
글로벌 혁신창업 성장허브 조성(리모델링)	13,735,000	22,296,500	13,712,703	13,712,703
사회적경제 혁신타운 조성	2,656,097	0	2,656,097	2,656,097
3․8민주의거 기념관 건립공사	3,163,750	944,472	2,219,277	2,219,277
제2 시립도서관 건립	6,000,000	120,860	5,879,139	5,879,139
대청호 전통누각 쉼터 조성사업	297,840	19,600	278,240	278,240
융복합 특수영상 콘테츠 클러스터 구축	6,000,000	29,425	5,970,574	5,970,574
베이스볼 드림파크 조성	11,840,500	1,550,000	11,838,950	11,838,950
한밭도서관내 국민체육센터 건립	7,039,136	0	7,039,136	7,039,136
한밭도서관내 생활문화센터 건립	518,000	0	518,000	518,000
작은내수변공원내 국민체육센터 건립	5,821,601	0	5,821,601	5,821,601
작은내수변공원내 생활문화센터 건립	518,000	0	518,000	518,000
길치근린공원내 국민체육센터 건립	3,906,382	0	3,906,382	3,906,382
길치근린공원내 생활문화센터 건립	582,000	0	582,000	582,000
학교시설복합화(대전고) 사업 국민체육센터 건립	200,000	0	200,000	200,000
학교시설복합화(대전고) 사업 공공도서관 건립	322,000	0	322,000	322,000
안영생활체육시설단지 1단계사업 시설개선	575,733	0	575,733	575,733
가족안심 시립요양원 건립	1,000,000	158,637	841,362	841,362
아동보호전문기관 신규설치	333,068	9,690	323,378	323,378
마달령 생태통로 조성사업	866,100	377,830	488,269	488,269
비점오염 저감사업 (그린빗물인프라 조성사업)	1,414,142	206,142	1,208,000	1,208,000
장동문화공원 조성	5,390,000	1,000,000	4,390,000	4,390,000
장동문화공원 조성사업	1,596,000	464,617	1,131,382	1,131,382
대동하늘공원 조성	2,394,000	0	2,394,000	2,394,000
보라매공원 도시숲확충사업	993,700	0	993,700	993,700
국가하천 유지관리	6,311,000	3,086,841	3,224,159	3,224,159
계절별 꽃단지 조성	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
주원천 하천재해 예방사업	6,000,000	1,431,000	4,569,000	4,569,000
화산천 하천재해 예방사업(전환)	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
화산천 하천재해 예방사업	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
대전산업단지 완충저류시설 설치	8,510,753	291,017	8,219,736	8,219,736
시내버스 공영차고지 및 기점지 내진보강 공사	300,000	0	300,000	300,000
서대전IC~두계3가 확장	9,592,000	2,297,490	7,294,509	7,294,509
노후 지하차도 시설개선	2,500,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000
한승미메이드아파트 ~한우물네거리 인도개설	977,000	40,000	937,000	937,000
유등천 좌안 자전거보행자 데크설치	1,000,000	7,395	992,604	992,604
대종로 도로구조 개선사업	1,270,000	130,045	1,139,954	1,139,954
교량 보수보공공사	5,020,000	1,500,000	3,520,000	3,520,000
중앙로프로젝트 마중물사업	5,188,000	1,859,618	3,328,381	3,328,381
도시재생 활성화 도심활성화 대전역 일원도시재생뉴딜사업	7,256,000	1,165,819	6,090,180	6,090,180
대전역세권재정비 촉진	36,656,000	29,056,000	7,600,000	7,600,000
목척교 야간경관 개선사업	811,500	411,500	400,000	400,000
범죄예방 도시 디자인추진	497,480	236,000	261,480	261,480
안영교 등 보수보강	1,620,000	1,250,000	370,000	370,000
신탄진과선교 보수보강	1,480,000	305,813	1,174,186	1,174,186
노은농수산물 도매시장관리사업소 경매장 시설개선(증축)	248,795	0	248,795	248,795
대전시립박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
만인산 자연휴양림 보완사업(휴양단지 조성)	2,841,000	500,000	2,341,000	2,341,000
장태산 자연휴양림 보완사업	2,297,000	1,252,202	1,044,797	1,044,797
합 계				139,543,704

■ 명시이월사업-특별회계

(단위:천원)

사 업 명	2022예산(이월년도)			2023예산(집행년도)
	예산액	집행액	이월요구액	이 월 예 산
평촌일반산업단지 지원도로 건설공사	3,754,000	1,462,684	2,291,315	2,291,315
평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업	1,352,660	0	1,352,660	1,352,660
평촌일반산업단지 하수처리시설 연계처리 관거사업	325,000	0	325,000	325,000
대전산업단지 재생사업 기반시설(도로공사)	5,207,592	408	5,207,183	5,207,183
대전산업단지 재생사업 주차장 조성공사	5,000,000	1,298,795	3,701,204	3,701,204
대전산업단지 복합문화센터 건립사업	1,400,000	972,437	427,563	427,563
도안대로 도로개설 공사	10,500,000	1,723,561	8,776,438	8,776,438
중부소방서 신축	7,965,641	4,835,770	3,129,870	3,129,870
산내119안전센터 이전신축	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000
궁동119안전센터 이전신축	210,240	78,883	131,356	131,356
합 계				26,932,589

◉ 중 구 청

■ 일 반 회 계

(단위:천원)

사 업 부 서	공 사 명	금 액
일자리경제과	• 문창전통시장 비가림 차양설치(전환사업) • 중앙로지하상가 엘리베이터 설치(전환사업)	246,078 536,460
여성가족과	• 청소년문화의집 메이커스페이스 공간조성 • 청소년종합복지센터(육아종합지원센터) 건립	133,000 2,000,000
공원녹지과	• 새로운 어린이공원 조성 • 안영3 어린이공원 리모델링 • 양묘장 관리자재 보관창고 신축공사 • 도시바람길숲 조성(보조) • 무궁화동산 조성	447,000 697,000 200,000 782,734 100,000
도시계획과	• 소로3-대사37호선 도로개설공사	900,000
건설과	• 안영동 210-3번지 일원 배수로 정비사업 • 뿌리공원 둘레길 조성사업 • 제설창고 이전공사 • 서대전역네거리 일원 자전거도로 정비공사 • 운남로(무수동∼구완동) 도로개설 • 산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업) • 산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업) • 중촌건널목 입체화 사업	270,000 1,495,000 150,000 149,500 999,000 399,000 399,000 1,000,000
건축과	• 석교동 복합커뮤니티센터 신축 • 석교동행정복지센터 임시청사 리모델링 • 문화동 마을회관 신축 • 당대경로당 신축 • 용두1경로당 신축 • 이화경로당 신축 • 방축골경로당 신축 • 범골경로당 신축 • 본동 경로당 신축 • 유천동 도시재생 뉴딜사업 • 석교동 도시재생 뉴딜사업	2,718,000 340,000 342,000 191,000 391,000 391,000 391,000 391,000 191,000 3,818,025 1,134,052
효문화마을관리원	• 뿌리공원 상수도관 확장공사	160,000
합 계		21,361,849

■ 특 별 회 계

(단위:천원)

사 업 부 서	공 사 명	금 액
교통과	• 중마을놀이터 공영주차장 입체화 사업 • 문화1동 제6노외주차장 입체화 사업 • 대흥3노외주차장 확장 조성사업 • 문화1노외주차장 확장 조성사업	449,000 294,000 538,000 1,796,000
합 계		3,077,000

■ 명시이월사업조서

(단위:천원)

사 업 명	2022예산(이월년도)			2023예산(집행년도)
	예산액	집행액	잔 액	이 월 예 산
중마을놀이터 공영주차장 입체화	819,000	0	819,000	819,000
당대경로당 신축	400,000	0	400,000	400,000
용두1경로당 신축	550,000	0	550,000	550,000
이화경로당 신축	300,000	0	300,000	300,000
방축골경로당 신축	350,000	0	350,000	350,000
범골경로당 신축	300,000	0	300,000	300,000
본동경로당 신축	400,000	0	400,000	400,000
은혜양로원 개보수	209,304	0	209,304	209,304
축복마을 개보수	317,130	0	317,130	317,130
중마을어린이놀이터 리모델링	248,500	0	248,500	248,500
소로3-대사37호선 도로개설공사	200,000	0	200,000	200,000
석교 내진보강사업	300,000	0	300,000	300,000
산성로 보행환경 개선사업	249,000	0	249,000	249,000
동서대로 보행환경 개선사업	299,000	0	299,000	299,000
오류로 자전거도로 정비사업	299,000	0	299,000	299,000
부사오거리 일원 자전거도로 정비사업	549,000	0	549,000	549,000
신평초 일원 보행환경 개선사업	250,000	0	250,000	250,000
문창초 일원 보행환경 개선사업	300,000	0	300,000	300,000
대전천 목척교∼중교보도 정비사업	399,000	0	399,000	399,000
계백로 지하보도 캐노피 설치사업	100,000	0	100,000	100,000
운남로 도로개설사업 (2차구간)	916,666	553,874	362,792	362,792
소로3 금동1호선 도시계획 도로개설	250,000	0	250,00	250,000
소로3 침산3호선 도시계획 도로개설	150,000	0	150,00	150,000
교통약자를 위한 무장애 보행로 조성	311,873	0	311,873	311,873
대전천 일원 하수박스 정비사업	350,000	28,986	321,014	321,014
답적골 소하천 정비사업 (1단계전환사업)	2,215,000	0	2,215,000	2,215,000
뿌리공원 둘레길 조성사업	2,693,000	0	2,693,000	2,693,000
뿌리공원 만성라바보 교체공사	500,000	0	500,000	500,000
목달천(소하천) 정비사업	897,000	12,300	884,700	884,700
태평1동 복합커뮤니티센터 신축	3,392,000	0	3,392,000	3,392,000
석교동 복합커뮤니티센터 신축	1,825,000	0	1,825,000	1,825,000
신촌경로당 개축	400,000	0	400,000	400,000
석교경로당 개축	400,000	0	400,000	400,000
문창2 경로당 신축	400,000	0	400,000	400,000
문화동 마을회관 신축	440,000	0	440,000	440,000
당대경로당 신축	300,000	0	300,000	300,000
용두1경로당 신축	100,000	0	100,000	100,000
이화경로당 신축	100,000	0	100,000	100,000
방축골경로당 신축	100,000	0	100,000	100,000
범골경로당 신축	100,000	0	100,000	100,000
본동경로당 신축	200,000	0	200,000	200,000
합 계				22,284,313

◉ 대덕구청

■ 일 반 회 계

(단위:천원)

사 업 부 서	공 사 명	금 액
미래교육과	• 청소년상담복지센터 및 학교밖청소년지원센터	280,000
에너지과학과	• 솔라트리 및 모스월조성	1,200,000
사회복지과	• 법동종합사회복지관 기능보강	350,000
일자리경제과	• 농업생산기반시설 확충	167,800
공원녹지과	• 도시숲 조성 - 쌈지공원조성 및 관리 - 가로수 정비 - 은행나무바꿔심기 - 도로변녹지대경관개선 - 도로변연결녹지조성 • 미세먼지차단숲 조성 • 도시바람길숲 조성사업 • 대단지꽃정원 조성 • 숲가꾸기사업(조림지가꾸기) • 공익숲가꾸기사업 • 임도신설사업 • 오정근린공원 조성사업 • 효심어린이공원화장실 리모델링사업 • 무장애도시숲 조성 • 새로운어린이공원 조성 • 도시공원잔디 유지관리사업 • 공중화장실 개선사업 • 길치문화공원시설 및 녹지관리 • 완충녹지(도시숲)개선사업 • 장애인편의시설 개선	196,407 168,489 196,407 196,408 196,407 486,950 782,734 148,928 156,564 118,204 227,700 1,992,800 119,142 993,250 1,345,200 220,000 114,000 100,000 110,000 100,000
교통과	• 노인보호구역개선사업 • 보호구역교차로종합정비사업 • 어린이보호구역 개선사업	399,000 898,000 399,000
도시계획과	• 장동휴양공원조성사업	446,760
건설과	• 도로긴급보수공사 • 생활권자전거도로 정비사업 • 간선자전거도로망 정비공사 • 하상도로포장공사(시민공모) • 대전터널노후시설물 교체사업 • 관내일원하수도긴급보수 및 준설공사 • 소하천정비사업	250,000 148,800 248,200 148,800 347,480 993,700 198,560
공공청사과	• 중리근린공원 복합문화센터(국민체육센터)	160,000
도시재생사업단	• 신탄진 주요가로 및 역전광장 정비 • 상생하우스공간 조성 • 꿈이룸센터 조성(대화동)	248,353 2,800,000 898,600
합 계		18,552,643

■ 특별회계

사 업 부 서	공 사 명	금 액
교통과	• 중리미래공영주차장 조성사업	1,500,000
합 계		1,500,000

◉ 동구청

■ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

사 업 부 서	공 사 명	금 액
정책개발협력실	• 동구세대통합 어울림센터 조성	2,400,000
일자리경제과	• 가오동 골목형 상점가 주차장 등 조성 • 신도꼼지락시장 아케이드 설치 및 리모델링 • 홍도동 상점가 고객지원센터 건립	8,000,000 2,354,600 655,000
관광문화체육과	• 신촌누리길 조성사업	999,000
공원녹지과	• 새로운어린이공원 정비 • 도시숲 조성(명품가로숲길 조성, 쌈지정원조성 등) • 자녀안심그린숲 조성 • 도시바람길숲 조성 • 한국전쟁 전후 민간인 희생자 전국단위 위령시설 조성	897,000 1,267,500 200,000 782,734 5,867,000
복지정책과	• 사회복지관 기능보강사업	630,000
여성아동과	• 동구 가족센터 건립(생활SOC 복합화 사업) • 동구 가족센터 주거지 주차장 건립(생활SOC 복합화 사업)	4,127,000 1,397,000
도시재생과	• 낭월 도시재생 토지보상 및 공사비	1,944,364
건설과	• 은어송중학교 후문 보도설치(시민제안) • 제2시립도서관 진입도로 확장 • 냉천로7일원 도로 확포장 • 산서길(대별동) 선형개량 • 대청호수로 측도설치 • 절암천 자연재해위험개선지구 정비사업	188,641 200,000 198,570 400,000 198,570 4,420,000
합 계		37,126,979

■ 특 별 회 계

(단위 : 천원)

사 업 부 서	공 사 명	금 액
환경과	• 추동 가래울천 비점오염저감시설 설치	1,540,700
교통과	• 용운동 주차장 조성사업 • 신인동 공영주차장 조성사업 • 가양2동 주차장 조성사업	1,949,000 1,134,000 990,000
합 계		5,613,700

■ 명시이월사업조서-일반회계

(단위:천원)

사 업 명	2022예산(이월년도)			2023예산(집행년도)
	예산액	집행액	이월요구액	이 월 예 산
중앙시장 화월통 아케이드 설치	2,299,066	0	2,299,066	2,299,066
중앙시장 내 공공건축물 내진보강사업	130,000	0	130,000	130,000
충암 누리길 조성사업	999,000	645	998,355	998,355
오백미촬영지코스 누리길 조성사업	599,000	0	599,000	599,000
마산동 마을회관 일원 누리길 조성사업	449,900	20,450	429,450	429,450
대청호 벚꽃길 관광명소화 사업	249,000	0	249,000	249,000
연꽃한터 조성사업	199,000	0	199,000	199,000
박팽년선생 유허 종합정비	281,000	27,227	253,773	253,773
판암주공4단지 전천후 게이트볼장 시설개선	200,000	0	200,000	200,000
대별동 족구장 시설개선사업	315,000	54,489	260,511	260,511
자연생태공간 조성	557,546	19,880	537,666	537,666
성남도제1경로당 외 1개소 내진보강사업	204,700	0	204,700	204,700
용운동 용방경로당 신축	1,118,000	0	1,118,000	1,118,000
동구 가족센터 건립 (생활SOC 복합화 사업)	518,000	254,228	263,772	263,772
대동 우리동네 살리기 도시재생 뉴딜사업	381,000	0	381,000	381,000
가오 새텃말 살리기 도시재생 뉴딜사업	1,453,000	36,754	1,416,246	1,416,246
대청동 자연취락지구 도시기반시설 정비사업	745,275	215,039	530,236	530,236
가족안심 시립요양원 진입도로 개설공사	1,644,489	50,000	1,594,489	1,594,489
소호동 27-3번지선 도로확포장공사	993,700	259,399	734,301	734,301
효평동 137-9번지 일원 마을안길 확장	100,000	0	100,000	100,000
옛신탄진로 도로 확장	290,905	0	290,905	290,905
은어송로51번길 인근 보행환경 개선	198,570	0	198,570	198,570
효평동 산39-7번지 급경사지 보강	995,617	0	995,617	995,617
대별동 우회도로 개설	2,000,000	1,175,599	824,401	824,401
소정 지하차도 연결도로 개설	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000
구도교 재가설공사	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
대청호수길 선형개량	1,760,000	0	1,760,000	1,760,000
대성동 삼익아파트 후면 도로개설	547,140	0	547,140	547,140
천동 111-8번지선 도로개설	957,640	403,598	554,042	554,042
비룡삼거리∼비룡1통 보도설치 및 도로확장	596,243	0	596,243	596,243
이사동 민속마을 진입도로 확포장	198,570	0	198,570	198,570
상소동 1076번지 일원 뒷골소하천 정비공사	148,920	0	148,920	148,920
가래울소하천 정비사업	1,191,360	0	1,191,360	1,191,360
상소동 1086번지 일원 큰골소하천 정비공사	520,462	0	520,462	520,462
소호동 547번지 일원 알미소하천 정비공사	130,000	0	130,000	130,000
하소동 765번지 일원 당골소하천 정비	100,000	0	100,000	100,000
가양동 청사 내진보강사업	117,000	0	117,000	117,000
대청동 청사 내진보강사업	116,900	0	116,900	116,900
				24,988,695

■ 명시이월사업조서-특별회계

(단위:천원)

사 업 명	2022예산(이월년도)			2023예산(집행년도)
	예산액	집행액	이월요구액	이 월 예 산
자양동 공영주차장 조성사업	1,090,000	21,352	1,068,648	1,068,648
용운동 공영주차장 조성사업	5,200,000	0	5,200,000	5,200,000
				6,268,648

◉ 유 성 구 청

■ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

사 업 부 서	공 사 명	금 액
문화관광과	• 공공도서관 건립 • 생활문화센터 조성	210,000 1,100,000
공원과	• 도시공원 및 녹지정비․유지관리 • 도시공원 및 녹지공간 정비 • 도시공원 주민커뮤니티공간 조성 • 광장리모델링 • 새로운어린이공원 조성 • 방동수변공간 여가녹지 조성 • 활골어린이공원 재정비	956,714 2,246,000 1,000,000 299,000 446,783 1,804,520 250,000
녹지산림과	• 가로수 조성 • 도로변녹지대 경관개선 • 건축물 옥상녹화조성 • 목재친화도시조성 • 자녀안심 그린숲조성 • 도시바람길숲 조성 • 여가녹지조성(유아숲체험원) • 녹지대 경관개선 • 미세먼지 저감조림	299,000 299,000 299,000 1,498,000 599,000 799,000 488,400 350,000 214,727
건설과	• 경찰진입도로확포장 • 생활권 자전거도로정비 • 대정길(소로1대정1호선)선형개량	1,698,334 200,000 512,000
합 계		15,569,478

■ 특 별 회 계

(단위 : 천원)

사 업 부 서	공 사 명	금 액
주차관리과	• 공영주차장 개선공사 • 봉산동 노상주차장 조성	309,000 200,000
합 계		509,000

■ 명시이월사업조서 - 일반회계

(단위:천원)

사 업 명	2021예산(이월년도)			2022예산(집행년도)
	예산액	집행액	잔 액	이 월 예 산
유성구 보훈회관건립	330,000	37,290	295,710	295,710
방동4통 경로당 조성	505,300	25,433	479,867	479,867
다함께돌봄센터 리모델링비	325,000	79,736	245,264	245,264
국공립어린이집 리모델링	560,000	201,279	358,758	358,758
어린이보호구역 개선사업	560,000	58,212	501,788	501,788
교통약자 보호구역관리 (교차로정비)	1,000,000	88,057	911,943	911,943
송강어린이공원 환경정비	300,000	0	300,000	300,000
관평동 한들어린이공원 시설정비	550,000	23,086	526,914	526,914
성북동 숲속야영장 조성	1,678,400	0	1,678,400	1,678,400
탄동천하도정비 및 준설	700,000	0	700,000	700,000
진잠천하도준설 및 제방보수	200,000	0	200,000	200,000
두계천 하도정비	290,000	18,500	271,500	271,500
관평천 친환경 생태공간 조성사업	250,000	11,550	238,450	238,450
성북동347-1번지 일원소교량 확장	300,000	0	300,000	300,000
지족동1060-1번지 일원보도정비	300,000	0	300,000	300,000
경찰진입도로 확포장	1,594,240	563,799	1,030,441	1,030,441
송강지구배수설비 공공관로정비공사	1,992,800	390,913	1,601,887	1,601,887
원내동일원하수도시설정비	500,000	103,218	396,782	396,782
합 계				10,337,704

◉ 서구청

■ 일 반 회 계

(단위:천원)

사 업 부 서	공 사 명	금 액
문화체육과	• 주민생활체육시설 설치 및 보수사업 • 서구국민체육센터 낙후시설 개선	150,000 550,000
사회복지과	• 경로당 유지보수비	200,000
여성가족과	• 생활SOC복합화 가족센터 건립 • 국공립어린이집 리모델링	1,500,000 100,000
일자리경제과	• 도마큰시장 폭염저감시설 조성 • 한민시장 폭염저감시설 조성	883,350 300,000
도시재생과	• 도마1동 도시재생 뉴딜사업 • 정림동(수밋들) 도시재생 뉴딜사업	6,130,330 3,918,321
공원녹지과	• 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 조성 • 자녀안심 그린숲 조성 • 무장애 도시숲 조성 • 도시바람길숲 • 새로운 어린이공원 조성사업 • 그린메디컬 스트리트 조성(2차) • 샘머리공원 리모델링 • 은평근린공원 노후시설 정비	1,504,540 400,000 299,000 781,000 697,000 498,000 2,960,000 1,495,000
건설과	• 봉곡길 도로확포장공사(5차) • 타임월드 주변 보행환경 개선사업 • 정림 자연재해위험지구 개선사업	1,000,000 1,200,000 2,993,590
합 계		27,560,131

■ 특별회계

사 업 부 서	공 사 명	금 액
주차행정과	• 용문동 공영주차장 조성	2,550,000
합 계		2,550,000

■ 명시이월사업조서 - 일반회계

(단위 : 천원)

사 업 명	2022예산(이월년도)			2023예산(집행년도)
	예산액	집행액	잔 액	이 월 예 산
괴정동 국민체육센터 건립	2,757,699	0	2,757,699	2,757,699
원도심 문예회관 건립	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000
서구국민체육센터 낙후시설 개선	450,000	0	450,000	450,000
도마큰시장 아케이드 보강	825,600	0	825,600	825,600
공동주택 관리동 국공립어린이집 전환 리모델링 공사	320,000	77,534	242,466	242,466
도마1동(도마실) 도시재생 뉴딜사업	5,337,420	0	5,337,420	5,337,420
도마(도솔) 도시재생 뉴딜사업	4,193,571	0	4,193,571	4,193,571
가수원근린공원 새단장	1,997,000	23,440	1,973,560	1,973,560
가수원근린공원 복합생활관 건립	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000
갑천누리길 조성사업	996,000	60,875	935,125	935,125
정림 자연재해위험지구 개선사업	9,536,000	271,363	9,264,637	9,264,637
다모아아파트 일원 하수관로 정비공사	697,000	0	697,000	697,000
장안소하천 정비사업	686,810	264,719	422,091	422,091
되창이소하천 정비사업	496,000	0	496,000	496,000
장바탕소하천 정비사업	897,000	0	897,000	897,000
유등천 보행자 산책로 정비	895,000	288,360	606,640	606,640
탄방로7번길 보행자우선도로 조성사업	300,000	0	300,000	300,000
합 계				34,498,809

■ 명시이월사업조서- 특별회계

(단위:천원)

사 업 명	2021예산(이월년도)			2022예산(집행년도)
	예산액	집행액	잔 액	이 월 예 산
월평1동 공영주차장 조성	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000
갈마동 복합커뮤니티센터(주차빌딩) 건립	5,599,025	0	5,599,025	5,599,025
갈마동제5공영주차장 조성	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
합 계				9,499,025

◉ 대전광역시 교육청

■ 특 별 회 계

(단위 : 천원)

사업내역	소관	공 사 명	금 액
학교신증설	본청	•(가칭)대전둔곡초중	25,013,313
		•(가칭)대전복용초	16,744,310
교실증개축	본청	•대전용산초	8,178,714
		•유성생명과학고	15,538,022
		•보문고	695,200
		•대전생활과학고	1,759,784
	동부교육청	•대전새여울초	649,933
		•대전은어송초	875,649
		•대전은어송중	2,814,578
기타시설 증개축	본청	•대전용산초	1,604,239
		•대전고	674,888
		•대전제일고	2,677,874
		•대전중앙고	1,927,824
		•호수돈여자고	3,798,443
	동부교육청	•대전동산초	3,826,996
		•대전천동초	1,662,964
		•동명초	1,115,421
		•대전태평중	5,245,670
		•대전대성여자중	2,597,772
		•대전신일여자중	2,944,792
	서부교육청	•기성초	3,698,440
		•남선초	3,698,440
		•대전선암초	3,658,397
		•대전신계중	3,752,890
		•기성중	186,440
		•대전대신중	373,800
		•대전동화중	1,721,400
교실부문 수선	본청	•대덕고	3,589,570
		•대전고	745,700
		•대전노은고	1,345,410
		•대전둔원고	281,880
		•대전만년고	900,147
		•대전복수고	466,438
		•대전송촌고	653,895
		•대전여자고	425,403
		•대전용산고	370,656
		•유성생명과학고(축구부기숙사)	323,987
		•충남기계공업고	3,021,192
		•대전체육고(태권도부,웨이트장)	712,503
		•대전체육고(남자기숙사)	882,288
		•대전대신고	523,100
		•보문고	1,848,649
		•우송고	472,712
		•대전원명학교	842,060
	동부교육청	•대전대양초	790,400
		•대전동산초	1,075,360
		•대전매봉초	763,290
		•대전목양초	405,721
		•대전송촌초	1,368,950
		•대전옥계초	1,839,220
		•대전용운초	678,250
		•대전자양초	914,990
		•대전현암초	2,074,221
		•대전흥룡초	1,042,261
		•와동초	786,794
		•대전대청중	973,763
		•대전법동중	1,431,741
		•대전용전중	1,012,599
	서부교육청	•대전삼천초	1,976,000
		•대전서원초	2,143,828
		•대전송강초	412,670
		•봉암초	705,090
		•대전둔원중	733,963
		•대전관저초	581,354
		•대전둔원초	3,355,357
		•금성초	1,295,056
		•문지초	1,033,735
		•한밭초	2,476,723
		•대전문지중	2,028,562
		•대전월평중	910,492
급식시설 개선	본청	•대전괴정고	1,469,229
		•대전용산고	1,631,383
		•유성생명과학고	1,645,540
		•대전원명학교	1,532,506
	동부교육청	•대전동서초	1,375,059
		•대전문창초	1,488,093
		•대전흥룡초	1,456,156
	서부교육청	•대전둔원중	1,715,968
		•대전외삼중	1,634,871
		•대전가장초	1,855,388
		•대전원앙초	1,715,968
		•대전도마중	1,715,968
		•외삼초	1,151,192
		•기성초	929,868
		•대전관평초	1,997,449
		•대전하기중	1,634,871
화장실 수선	본청	•대전여자고	973,269
		•충남고	1,388,454
	동부교육청	•대전목동초	1,109,603
		•대전비래초	1,122,352
		•새일초	1,486,246
		•대전대청중	999,147
		•신탄중앙중	1,465,722
	서부교육청	•대전노은초	2,043,070
		•대전수미초	1,442,483
		•대전신계초	2,322,036
		•대전지족초	821,607
		•대전하기초	1,331,523
		•대전둔원중	779,658
		•대전외삼중	967,770
		•금성초	779,658
		•대전원양초	1,002,417
		•진잠초	779,658
		•대전괴정중	1,553,443
		•대전하기중	2,100,889
기타시설 개선	동부교육청	•대전비래초	617,953
		•대전가양중	811,925
		•대전송촌중	533,150
		•대전매봉중	606,000
	서부교육청	•대전갈마초	1,197,810
		•대전반석초	784,140
		•외삼초	619,720
		•대전두리초	588,470
외부환경 개선	본청	•대전고	876,650
		•신탄진고	581,026
		•대전체육고	831,105
	동부교육청	•신탄진초	654,295
	서부교육청	•대전서부초	1,199,068
		•대전자운초	660,841
안전제고 시설개선	본청	•노은초	3,040,953
	동부교육청	•대전가양초	770,221
		•대전비래초	542,345
		•대전중앙초	1,067,769
	서부교육청	•금성초	1,589,400
그린스마트 스쿨	본청	•대전체육고	14,426,992
		•대덕고	10,346,613
		•유성고	8,301,373
		•대전국제통상고(3차분)	5,774,317
		•대전국제통상고(2차분)	8,004,329
		•대전성모여고	3,925,209
		•대전제일고	3,953,903
		•청란여고	2,413,986
		•호수돈여고	6,214,735
		•계룡디지텍고	3,342,457
		•대성여고	1,734,248
		•대전국제통상고(2동)	1,319,074
	동부교육청	•대전천동초	4,809,344
		•대전태평초	3,232,340
		•화정초	2,884,589
		•대전중	1,860,484
		•한밭여자중	941,571
	서부교육청	•금성초	5,576,374
		•대신중	2,288,331
		•진잠중	3,085,905
합 계			329,079,702