2004년도 건설공사 집행계획

□대전광역시청, 각 사업소 및 각 구청

□대전광역시교육청 및 동·서부교육청

대한건설협회 대전광역시회

▣ 대전광역시

■ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
사회개발비	문화·예술	·기타문화재 보수정비 - 시설비 100,000,000원 * 1식 = ·보문산장대루 신축공사 200,000,000원 * 1식 = ·시민회관증개축 및 개보수비(리모델링사업) - 개보수 1,798,940,000원 * 1식 =	100,000 200,000 1,798,940
	체육관리	·체육기반시설확충 1,000,000,000원 * 1식 = ·인라인스케이트장 건설 560,000,000원 * 1식 = ·국민생활관 보수공사 100,000,000원 * 1식 =	1,000,000 560,000 100,000
	환경관리	·대청호 다년생수생식물 재배사업(상수도특별회계) ·하수관거사업(하수도특별회계) ·흑석처리장건설사업(하수도특별회계) ·신일동 환경에너지사업소 소각시설 증설 5,000,000,000원 * 1식 = ※총사업비 100억원(현금 50억원, 채무부담 50억원) ·상서동매립지 생태공원 조성 670,000,000원 * 1식 = ·도시개발공사 위탁대행사업비 금고동 환경자원사업소 조경공사 100,000,000원 * 1식 =	320,000 1,375,000 330,000 5,000,000 670,000 100,000

(단위:천원)

과 목		공 사 명	금 액
사회개발비	공원녹지관 리	·남부외곽순환도로(2단계)확장공사 2,000,000,000원 * 1식 = ※총공사비 9,780백만원(기투자 1,000, 앞으로 6,780) ·둔산대공원(수목원)조성(1단계) 2,500,000,000원 * 1식 = ※총사업비 10,700백만원(기투자7,500, 앞으로700) ·대전플라워랜드 조성 1,000,000,000원 * 1식 =	2,000,000 2,500,000 1,000,000
	사회복지	·영렬탑이전 보훈공원조성 공사비 2,368,420,000원 * 1식 =	2,368,420
	여성정책 관 리	·(구)충남도여성회관 리모델링 500,000,000원 * 1식 =	500,000
	노인복지	·노인복지회관 신축	1,188,127
	지역개발	·소규모주민숙원편익사업비	500,000

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	지역경제개 발	·대전종합유통단지 북부진입로(유통단지∼장대삼거리:L=5.3km) ※총사업비46,600, 기투자20,000, 금회10,000(감리비포함), 앞으로16,600 ·바이오벤처타운 건립사업 - 건축비 ·나노종합팹센터 지원 ※총지원계획20,000백만원(기3,000, 금회3,000, 앞으로14,000) ·고주파부품산업지원센터 건립 ※총사업비17,000백만원(기4,800,금회4,200,앞으로8,000) ·지능로봇산업화센터 건립 ※총사업비25,700백만원(기2,510,금회5,200,앞으로17,990)	9,800,000 5,946,144 3,000,000 4,200,000 5,200,000
	산림자원관 리	·장태산휴양림조성(보완) ·숲가꾸기(169ha) 218,884,000원 * 1식 = ·큰나무공익조림(10ha) 147,913,000원 * 1식 = ·자생식물 식재(2km) 142,858,000원 * 1식 =	2,000,000 218,884 147,913 142,858
	하천관리	·3대하천정비 및 시설물 개보수공사 - 갑천(L=500m) 1,140,000,000원 * 1식 = - 유등천(L=500m) 1,140,000,000원 * 1식 = - 대전천(L=300m) 970,000,000원 * 1식 =	1,140,000 1,140,000 970,000
	치 수 및 재해대책	·하천 및 잔디포 정비 886,459,000원 * 1식 = ·꽃단지 조성 - 유채단지조성 1,064원 * 170,300□ = ·하천부속물정비 250,000,000원 * 1식 =	886,459 181,200 250,000

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	도로건설	·동부순환도로개설(3공구) ※총사업비32,200백만원, 기투자6,300, 앞으로투자21,900 -시설비(L=700m,B=25m) ·동서관통도로건설공사 -2공구(경부선철도∼대전역사,L=117m,B=30m,철도청위탁) 시설비(L=80m, B=30m) -3공구(대전역광장, L=127m, B=30m) 시설비(L=30m, B=30m) ·벌곡길확장(1공구) 마무리 시설비(L=300m, B=25m) ·계백로(가수원교) 확장 ※총사업비27,000백만원, 기투자11,250, 앞으로투자12,150 시설비(L=550m, B=50m) ·국립대전현충원∼학하동간 도로개설 ※총사업비5,500백만원, 기투자2,800, 앞으로투자700 시설비(L=400m, B=25m) ·계룡육교 확장 ※총사업비29,765백만원, 기투자12,510, 앞으로투자15,155 시설비(교량하부공) ·가오택지지구 진입로 개설 ※총사업비4,800백만원, 기투자0, 앞으로투자2,800 시설비(L=120m, B=25m)	3,900,000 6,500,000 2,350,000 2,000,000 2,350,000 1,200,000 1,900,000 2,000,000

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	건설사업 관 리	·시관내 도로포장 정비(L=2,200m, A=380a) ·중구언고개확장 및 종단개량공사(L=380m, B=20m) ※총사업비1,900백만원, 기투자700, 앞으로투자500 ·대전천우안도로건설공사(천석교∼홍익아파트) ※총사업비3,580백만원, 기투자1,580, 앞으로투자1,000 ·구즉로(천연가스충전소)확장 ※총사업비3,450백만원, 기투자40, 앞으로투자2,910 ·복개도로 보수보강공사(자양로외 10개노선) ·교량점검로 설치공사(와동육교외 1개교) ·교량방호난간설치공사(방동대교외 2개교) ·교량보수보강공사(문화육교외 3개교) ·도로굴착복구 관련 사업비(아스팔트포장)	500,000 700,000 1,000,000 500,000 300,000 250,000 150,000 500,000 1,992,800
민방위비	소방관리	·남부소방서 신축 - 시설비 906,816,000원 * 1식 = ※총사업비4,551백만원, 금회1,000, 앞으로투자3,551	906,816

■ 기타특별회계

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
사회개발비	주택사업 관 리	·소규모 임대주택 건축비(부사) 2,700,000원 * 200평 * 1개소 =	540,000
경제개발비	도시교통 사 업	·대흥동공영주차장정비 128,000,000원 * 1식 =	128,000
	교통안전시 설	·교통사고잦은곳개선사업 119,280,000원 * 5개소 = ·위험도로개선사업 249,100,000원 * 10개소 = ·어린이보호구역정비 169,388,000원 * 15개소 =	596,400 2,491,000 2,540,820
	광역교통 시 설	·계룡휴게소∼삽재간도로확장(3공구) - 공사비 ·대둔산길확장(산성∼구례) - 공사비	7,576,000 8,255,000
	지 하 철 건설지원	■도시철도1호선건설 ·1단계구간토목공사 -1-5공구(총사업비34,714, 기투자28,254, 앞으로1,460) -1-6공구(총사업비100,719, 기투자81,691, 앞으로8,228) -1-7공구(총사업비84,592, 기투자70,128, 앞으로3,264) -1-8공구(총사업비63,263, 기투자49,020, 앞으로3,543) -1-9공구(총사업비39,291, 기투자34,325, 앞으로1,166)	5,000,000 10,800,000 11,200,000 10,700,000 3,800,000

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	지 하 철 건설지원	·2단계구간토목공사 -1-12공구(총사업비41,664, 기투자28,821, 앞으로7,443) -1-13공구(총사업비38,541, 기투자25,461, 앞으로6,080) -1-14공구(총사업비40,037, 기투자22,362, 앞으로11,975) -1-15공구(총사업비24,669, 기투자16,417, 앞으로2,852) -1-16공구(총사업비29,645, 기투자18,040, 앞으로8,505) -1-17공구(총사업비39,125, 기투자23,098, 앞으로11,527) -1-18공구(총사업비28,386, 기투자18,475, 앞으로7,811) -1-19공구(총사업비25,427, 기투자16,366, 앞으로7,161) -1-20공구(총사업비31,436, 기투자19,872, 앞으로8,764) -1-21공구(총사업비38,263, 기투자16,972, 앞으로14,191) -공동구(총사업비1,161, 기투자961, 앞으로0) ·종합사령실(토목,건축,기계/총28,830,기16,857,앞으로5,173) ·정거장 건설공사 -1단계구간(총사업비85,803, 기투자7,877, 앞으로41,526) -2단계구간(총사업비56,522, 기투자0, 앞으로56,322) ·궤도부설공사 -1단계구간(총사업비31,017, 기투자12,572, 앞으로7,645) -2단계구간(총사업비23,194, 기투자0, 앞으로23,094) ·대전역서광장지하철출입구 시설공사	5,400,000 7,000,000 5,700,000 5,400,000 3,100,000 4,500,000 2,100,000 1,900,000 2,800,000 7,100,000 200,000 6,800,000 36,400,000 200,000 10,800,000 100,000 2,533,000

■ 명시이월사업조서

◎ 일 반 회 계

(단위:천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
계족산성 복원정비공사	428,571	0	428,571	428,571	절대공기(180일) 부족
지방문화산업 기반조성사업 (첨단문화산업클러스터)	4,303,600	0	4,303,600	4,303,600	절대공기 부족
시민회관사무실증축 및 별관 개보수	995,633	0	995,633	995,633	절대공기 부족
금고동 위생매립장 조성공사	3,253,000	2,202,165	1,050,835	1,050,835	2차계약분에 대한 준공기한 미도래로 `04년도로 이월집행
소각로 주변 (목상동)지역난방 공급을 위한 건설	900,000	0	900,000	900,000	열공급대상 아파트가 지연 선정
남부외곽도로 (동물원 진입도로 2단계)확장	1,000,000	1,450	998,550	998,550	도시관리계획변경 공람 등 절차이행으로 일시정지되어 부득이 `04년도로 이월집행
젊음의 광장 조성	1,200,000	1,060,897	139,103	139,103	절대공기 부족
영렬탑이전보훈공원 조성공사	2,387,000	130,000	2,257,000	2,257,000	기본설계공모지연으로 절대공기 부족
공설납골당 건축	1,429,540	0	1,429,540	1,429,540	행정절차이행중에 있어 부득이 `04년도로 이월집행

(단위:천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
청소년수련마을 증축공사	471,400	0	471,400	471,400	중구청 도시계획시설결정 지연으로 `04년도로 이월집행
대전종합유통단지 북부진입로공사	9,700,000	5,440,000	4,260,000	4,260,000	보상협의 지연 등 절대공기부족으로 `04년도로 이월집행
관광안내소 건립	188,694	0	188,694	188,694	중구청의 사업포기와 추후 설립부지 선정지연
과학기술창조의 전당(컨벤션센터)통합건립	5,030,000	0	5,030,000	5,030,000	관련 기관간 협의중으로 `04년도로 이월집행
둔산대공원 (수목원)조성	2,500,000	2,135,115	364,885	364,885	1단계 장기계약계속공사로 절대공기 부족
장태산휴양림 조성(보완)	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	절대공기 부족
3대하천 하도준설 및 정비	1,771,257	0	1,771,257	1,771,257	`03.12.6설계완료예정으로 이월집행
동부순환도로 (3공구)개설공사	2,800,000	700,000	2,100,000	2,100,000	절대공기(12개월) 부족
금산선 확장공사 (2공구)	1,500,000	600,000	900,000	900,000	절대공기(12개월) 부족
국립현충원∼학하동간 도로개설공사	2,800,000	57,000	2,743,000	2,743,000	보상절차 이행중
석봉가도교 확장	3,400,000	800,000	2,600,000	2,600,000	절대공기 부족

(단위:천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
백룡길 확장	1,486,000	93,000	1,393,000	1,393,000	보상절차이행등 부득이 `04년도로 이월집행
계룡로∼입의마을간 도로개설공사	550,000	198,000	352,000	352,000	민원으로 공사 지연
언고개 확장 및 종단선형개량공사	700,000	184,000	516,000	516,000	보상협의 지연
대전천우안도로 건설공사	1,500,000	1,242,000	258,000	258,000	보상협의기간 부족
경부고속도로 폐도 보수공사	1,370,000	734,774	635,226	635,226	전기공사설계중으로 `04년 이월집행 `04.1.20착공예정
교량보수보강공사	1,000,000	620,000	380,000	380,000	절대공기 부족
한밭도서관길 수해복구공사	122,651	0	122,651	122,651	절대공기 부족

■주택사업 특별회계

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
소규모 임대주택 건립사업	2,163,880	250,494	1,913,386	1,126,239	사업대상지 토지소유주 계약이행 지연

■도시교통사업 특별회계

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
보차공존도로 조성 (선사유적지주변도로)	160,000	0	160,000	160,000	절대공기 부족
학교주변어린이보호 구역 교통안전시설정비 (한밭초교등 13개교)	2,214,000	469,662	1,744,338	1,744,338	절대공기 부족
교통사고 잦은곳 개선 사업(괴정동 한국통신 네거리 등 23개소)	2,763,000	1,873,040	889,960	889,960	일부구간 공사협의 지연등 공기부족

■광역교통시설 특별회계

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
계룡휴게소∼삽재간 도로확장(3공구)	6,000,000	3,130,000	2,870,000	2,870,000	절대공기 부족
대둔산길 확장 (터널)	8,100,000	1,619,000	6,481,000	6,481,000	절대공기 부족
옥천길 확장 (제2치수교∼ 102정거장간)	6,966,000	5,160,873	1,805,127	1,805,127	`04.3.21준공예정에 따라 `04년도로 이월집행

▣ 중  구  청

■ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
사회개발비	환경관리	·선화동 삼성생명주변 하수관개량(L=300m) ·대흥동사거리 하수관거 정비공사(L=300m) ·대흥동 451번지선 하수관거 정비공사(L=300m)	198,570 198,570 198,570
	공원녹지 관 리	·녹색환경도시 대전생명의 나무심기 - 시민휴식공간조성 ·원도심 활성화사업(시 원도심활성화기금) - 선화동 선화공원정비	198,570 187,000
	도시개발 관 리	·주거환경 개선사업 - 부사2지구 도로개설공사 - 문화지구 도로개설공사 - 대사2지구 도로개설공사 - 목동2지구 도로개설공사 - 선화1지구 도로개설공사	1,340,125 2,065,146 1,335,884 2,395,425 2,968,492
경제개발비	산림자원 관 리	·숲가꾸기 육림(200ha) ·임 도(4km)	256,751 496,426
	하천관리	·정생천 수해상습지 개선사업(L=1,300m) - 공사비(설계비포함) 827,784,000원 * 1식 = ·소하천(답적골천) 정비사업(L=100m) - 공사비(설계비포함)	827,784 178,714

(단위:천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	도로건설	·대흥동 385-387번지선 도로개설(L=120m, B=4m) ·부사동 364번지선 도로개설(L=100m, B=12m) ·호동 범골진입 도로개설(L=50m, B=15m) ·자전거 이용시설 정비(L=860m) ·원도심 활성화사업(시 원도심활성화기금) - 대흥동 59-17번지선 도로개설(L=100m, B=6m) ·선화동 362-71번지선 도로개설(L=50m, B=8m) ·목동 94-58번지선 도로개설(L=40m, B=4m) ·중촌동 21-18번지선 보도정비(L=500m, B=2m) ·문창동 물레방아 5길 57호선(35번지선) - 도로개설(L=90m, B=6m) ·석교동 287번지선 도로개설(L=220m, B=6m) ·석교동 219-3번지선 도로개설(L=65m, B=6m) ·부사동 234-292번지선 도로개설(L=92m, B=6m) ·부사동 235-9번지선 도로개설(L=40m, B=6m) ·용두동 151-1번지선 도로개설(L=220m, B=6m) ·오류동 192번지선 도로개설(L=50m, B=6m) ·태평1동 278-12번지선 도로개설(L=20m, B=6m) ·문화2동 517-4번지선 도로개설(L=60m, B=6m) ·문화2동 439번지선 도로개설(L=10m, B=4m) ·도로굴착 복구공사	129,070 148,928 99,286 238,284 297,855 300,000 150,000 100,000 200,000 400,000 250,000 100,000 150,000 300,000 250,000 150,000 150,000 150,000 500,000

■ 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
경로당 신축(3개소)	391,159	0	391,159	391,159	절대공기 부족
경로당 개보수	190,000	0	190,000	190,000	절대공기 부족
문창재래시장활성화 지원사업(아케이트 설치 및 담장보수)	725,519	7,797	717,722	717,722	절대공기 부족
어린이공원 정비	178,883	0	178,883	178,883	절대공기 부족
보문산 교통광장 (주차장) 조성	695,617	0	695,617	695,617	절대공기 부족
구청사별관 신축공사	1,782,000	0	1,782,000	1,782,000	절대공기 부족
대흥동 426번지선 (대전고교앞)암거시설공사	107,840	0	107,840	107,840	절대공기 부족
대사동축대옹벽 복구공사	200,000	7,440	192,560	192,560	절대공기 부족
어남동47번지선 (답적골천3개공구) 소하천 복구공사	182,455	7,070	175,385	175,385	절대공기 부족
정생동산2-3번지외 9건 소하천복구공사	530,385	15,060	515,325	515,325	절대공기 부족

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
목달동소하천제방 및 구거정비공사	459,916	0	459,916	459,916	제3회 추경예산반영으로 절대공기 부족
정생동구거정비공사	139,000	0	139,000	139,000	제3회 추경예산반영으로 절대공기 부족
어남선도로 확포장 (정생2교개량)공사	1,183,223	25,223	1,158,000	1,158,000	제2회 추경예산확보로 절대공기 부족
목동4번지선 도로개설공사	447,140	64,001	383,139	383,139	절대공기 부족
부사동 367번지선 도로개설공사	373,855	176,459	197,396	197,396	절대공기 부족
어남선도로 어남2교 개량공사	397,140	0	397,140	397,140	절대공기 부족
문화1동23-29번지선 도로개설공사	496,425	0	496,425	496,425	보조금(시비)확정 통보지연으로 인한 절대공기부족
문창동 물레방아5길 57호선도로개설공사	397,140	4,747	392,393	392,393	보상협의지연으로 절대공기 부족
자전거 이용시설 정비사업	250,198	0	250,198	250,198	보조금(국비->시비)변경결정에 따른 제2회추경예산확보로 절대공기 부족
어남동 195번지선 도로복구공사	138,720	0	138,720	138,720	절대공기 부족

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
대사동 161번지선 도로개설	100,000	0	100,000	100,000	보상협의지연으로 절대공기 부족
대흥동385-387번지선 도로개설	448,570	168,482	280,088	280,088	보상협의지연으로 절대공기 부족
대흥동 240-83번지선 도로개설	300,000	123,258	176,742	176,742	보상협의지연으로 절대공기 부족
석교동 287번지선 도로개설	398,927	91,160	307,767	307,767	보상협의지연으로 절대공기 부족
호동 260-2번지선 도로개설	600,000	174,001	425,999	425,999	제2회추경예산확보로 절대공기부족
부사동 364번지선 도로개설	297,855	0	297,855	297,855	제2회추경예산확보로 절대공기부족
사정동 효성연립옆 도로개설	150,000	0	150,000	150,000	제2회추경예산확보로 절대공기부족

▣ 동  구  청

■ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
사회개발비	하수관리	·하수관거 정비사업 - 용전동 165번지선일원 하수도정비(L=600m) - 소제동 305번지선 하수도정비(L=440m) - 가양동 420-75번지선외 3개소 하수도정비(L=430m) - 긴급 하수도정비 ·원도심활성화 기금사업 - 삼성로 하수도 정비사업(뚜껑교체 L=900m) ·중동 88번지선 하수도 정비공사((비굴착 L=140m) ·곤룡천외 2개소 하수Box 준설(시 하특 : L=3,000m)	168,484 148,662 118,930 198,158 119,142 100,000 248,212
	공원·녹지 관 리	·열린교정 푸른숲조성(2개소:실시설계비 3.73%포함)	248,212
경제개발비	농·축정 관 리	·비룡동 459번지선외 1개소 농로포장(L=650m, B=4m) ·효평동 235번지선 농로 확·포장(L=700m,B=3.5m,A=21a)	131,716 100,000
	지역경제 개 발	·중앙시장 공중화장실 건립(건축 66□)	171,559
	치 수 및 재해대책	·하소동 767번지선(전석 L=80m H=3m, 암거 2개소) ·소호동 455번지선(전석 L=120m H=2.5m)	100,000 100,000

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	도로관리	·자전거 이용시설 정비사업 - 자전거도로(L=1.0km, 보관대 300대분) ·원도심활성화 기금사업 - 성남동 72번지선 도로개설(L=70m B=8m) - 중동 62번지선 보도정비(L=1,000m B=2∼4m) ·천동 177번지선 도로개설(L=60m B=6m) ·도로굴착복구비(자부담) ·가양동 534-7번지선 도로개설(L=100m B=8m) ·판암동 536번지선 도로개설(달기장골 : L=60m B=6m) ·성남동 223번지선 도로개설(L=340m B=4∼8m) ·홍도동 88-5번지선 도로개설(L=50m B=8m) ·판암동 525번지선 도로개설(L=420m B=12m) ·천동 165번지선 도로개설(L=70m B=8m) ·성남초교∼성남동 197-1번지선 도로개설(L=180m B=15m) ·자양동 277번지선 도로개설(L=100m B=6m) ·천동 230번지선 도로개설(L=80m B=8m) ·충남중학교일원 도로개설(L=40m B=4m) ·우송중학교뒤 도로개설(L=60m B=6m) ·가양2동 112번지선 도로개설(L=60m B=8m) ·도로긴급수선 및 구조물 정비 ·관내일원 이면도로 아스콘 덧씌우기	238,284 347,498 148,927 198,570 200,000 300,000 300,000 350,000 100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 200,000 200,000 300,000 150,000 100,000 100,000

■ 명시이월사업조서

◎ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
용운종합복지관 건 립	400,000	0	400,000	400,000	제2회추경(`03.10)에 편성된 특별교부세 지원사업으로 부족사업비 확보후 추진
대성동 통합경로당 신 축	289,024	117,751	171,273	171,273	절대공기 부족
가양1동오거리경로당 (가칭)신 축	248,212	124,960	123,252	123,252	절대공기 부족
영아전담 보육시설 신 축(2개소)	287,100	0	287,100	287,100	절대공기 부족
대청호 자연생태관 조 성(건축등)	1,111,082	0	1,111,082	1,111,082	절대공기 부족
음식물쓰레기 자원화시설 설치	1,560,000	0	1,560,000	1,560,000	절대공기 부족
녹색농촌 체험마을 조성사업	193,606	7,700	185,906	185,906	수도법,GB관련법 저촉에 의한 사업계획변경으로 절대공기 부족
동구포도 홍보조형물 설 치	198,570	0	198,570	198,570	부지선정, 관련기관관의 협의지연등 공기부족
중앙시장 아케이드 설 치	597,312	0	597,312	597,312	상인반대 및 위치선정 합의지연

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
중앙시장 진입로 정 비(3종)	198,570	0	198,570	198,570	사업구간이 한국전력의 2004 전선지중화사업과 중복되어 연계추진코자 이월
중앙시장 공중화장실 건 립	800,000	0	800,000	800,000	위치선정 및 행정절차이행등 공기 부족
재래시장 환경개선 (흥룡,중부,용운시장 공중화장실 정비)	188,305	0	188,305	188,305	절대공기 부족
신도시장 아케이드 설 치	500,000	0	500,000	500,000	민간부담금 확보지연
야외이벤트장 조성	400,000	0	400,000	400,000	위치선정지연과 잔여예산부족
열린교정 푸른숲 조성사업	250,000	12,000	238,000	238,000	절대공기 부족
어린이공원 정비사업 (특별교부금:동산,봉곡공원)	150,000	0	150,000	150,000	절대공기부족
삼괴동 456-2번지선 도로확·포장 (개발제한구역내 주민지원사업)	723,180	20,400	702,780	702,780	절대공기부족
삼괴동 647번지선 도로확·포장 (개발제한구역내 주민지원사업)	734,707	0	734,707	734,707	절대공기부족
세천동 산2-1번지선 도로확·포장 (개발제한구역내 주민지원사업)	806,821	0	806,821	806,821	절대공기 부족

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
산림분야 수해복구 (하소동55-1외 1개소)	209,441	7,400	202,041	202,041	절대공기 부족
삼성2동 313번지선 하수도개량	129,071	0	129,071	129,071	절대공기 부족
수해상습지 개선사업	1,685,598	0	1,685,598	1,685,598	절대공기 부족
큰골 소하천외 3개소 수해복구	137,609	6,800	130,809	130,809	절대공기 부족
대전천(지방2급) 수해복구	160,589	7,700	152,889	152,889	절대공기 부족
알미 소하천 수해복구 (1차)	108,489	5,800	102,689	102,689	절대공기 부족
대전천 산책로 조성	100,000	0	100,000	100,000	대전천하도정비공사구간과 중복되어 이중굴착방지위해 이월
하소동 133-4외3개소 수해복구	127,588	6,500	121,088	121,088	절대공기부족
하소동 576번지선 재해예방	200,000	8,600	191,400	191,400	절대공기부족
자전거 이용시설 정비사업	250,198	0	250,198	250,198	절대공기부족
용운동 321번지선 도로개설	443,752	54,338	389,414	389,414	소유주와 보상협의 지연
성남동 200-214번지선 도로개설	491,886	59,448	432,438	432,438	시비보조결정 지연 및 보상협의 지연

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
가양동 534-7번지선 도로개설	295,834	0	295,834	295,834	시비보조결정 지연 및 보상협의 지연
판암동 303번지선 도로개설	296,838	0	296,838	296,838	역세권 개발계획과 연계되어 사업보류중
판암동 525번지선 도로개설	395,614	293,162	102,452	102,452	종중토지 소유사실확인에 따른 보상협의 지연
홍도동 92-35번지선 도로개설	296,838	94,022	202,816	202,816	토지 및 지장물 보상협의 지연
판암1동 290번지선 도로개설	200,000	44,778	155,222	155,222	수용재결중으로 년내사업추진불가
성남동 47번지선 도로개설	300,000	169,100	130,900	130,900	수용재결에 따른 절대공기 부족
판암동 525번지선 도로개설	198,570	0	198,570	198,570	종중토지 소유사실확인에 따른 보상협의 지연
용운동 새울부락 도로개설	350,000	237,200	112,800	112,800	소유주와 보상협의 지연
용운동 새울부락 도로개설(교)	496,426	0	496,426	496,426	보상협의 지연
성남동 233번지선 도로개설	450,000	202,840	247,160	247,160	보상협의 지연
용운동 492∼대동 35번지선 도로개설	300,000	171,586	128,414	128,414	절대공기 부족
신흥동 충남중학교주변 도로개설	400,000	120,331	279,669	279,669	충남중(교육청)과 보상협의 지연

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
현암교 언더패스시설	198,570	8,305	190,265	190,265	동절기 공사중지등 공기부족
성남동 198-28번지선 도로개설	500,000	0	500,000	500,000	보상협의 지연
홍도동 88-5번지선 도로개설	350,000	249,671	100,329	100,329	보상협의 지연
하소동 418-1번지선 도로개설	190,000	16,536	173,464	173,464	동절기 공사중지등 공기부족
가목교 개량공사	200,000	7,000	193,000	193,000	동절기 공사중지등 공기부족
금동선 아스콘 덧씌우기	200,000	6,870	193,130	193,130	동절기 공사중지등 공기부족
가양1동 508-14번지선 도로개설	300,000	31,080	268,920	268,920	보상협의 지연
산내 소호동 333번지선외5개소 농로 수해복구	110,000	3,778	106,222	106,222	동절기 공사중지등 공기부족
제1치수교∼신흥교간 도로개설	250,000	100,000	150,000	150,000	철도청과의 보상협의 지연

◎ 특 별 회 계

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산(이월년도)			2004예산(집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔 액	2004이월예산
표고목 설치 및 종균 느릅나무 묘목 구입	123,500	0	123,500	123,500	벌목시기(12월), 종균접종시기(3월)를 맞추기 위하여 사업시행시기 조정
제2성남교 확장·개량 (삼성1지구)	1,537,000	0	1,537,000	1,537,000	절대공기 부족
용운지구 중로 1-173호선 도로개설	1,447,000	542,932	904,068	904,068	보상협의 지연 및 공기부족
석촌2지구 도로개설 대행사업비	991,080	0	991,080	991,080	공기부족 및 행정 절차이행기간 소요
대동지구 도로개설 대행사업비	363,000	0	363,000	363,000	공기부족 및 행정 절차이행기간 소요
낭월지구(1공구) 기반시설공사	3,000,000	700,000	2,300,000	2,300,000	사업계획변경과 지장물보상협의지연
용운지구 상수도, 전기, 조경공사	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	기반시설공사지연

▣ 유 성 구 청

■ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
일반행정비	자치행정 운 영	·노은동사무소 신축(800평) ※ 총사업비 2,560백만원(03년:2,060, 금회(기채) : 500) ·온천1동사무소 건립 ※ 총사업비 1,440백만원(03년:540, 금회 : 900)	500,000 900,000
사회개발비	보건소운영	·세동보건진료소 신축 및 구조물철거 375,000,000원 * 1개소 =	375,000
	하수관리	·원내동 200번지선 하수관거 정비공사(L=1.3km) ※ 총사업비 771,310천원(금회 376,080, 앞으로 395,230) ·관내시가지 하수도 나무뿌리 제거공사(L=5km) ·하수도 긴급보수비 25,000,000원 * 4회 = ·관내일원 배수불량지역 준설공사(L=3km) ·금탄동 50번지선 배수로정비공사 - 석축 H=2m, L=600m	376,080 100,000 100,000 100,000 100,000
	가정복지	·영아전담시설 신축비(2개소) ·종합복지센터 건립 ※ 총사업비 4,541백만원(기투자3,141, 금회 400, 앞으로 1,000)	287,100 400,000
	주거환경개선사업	·공기관등에대한대행사업비 - 봉산1지구 주거환경개선사업 도로개설사업 - 봉산2지구 주거환경개선사업 도로개설사업 - 봉산3지구 주거환경개선사업 도로개설사업 - 봉산4지구 주거환경개선사업 도로개설사업	841,118 703,862 994,619 1,013,869
	지역개발 관 리	·도로굴착 복구비	500,000

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	농정관리	·금탄동 농로포장공사 ·용계동 1지구 용수로개보수공사 ·봉산동 416번지선 구거정비(2003특)	109,667 101,400 100,000
	산림·녹지관 리	·열린교정 푸른숲 조성 150,000,000원 * 2개소 = ·시민휴식공간 조성 200,000,000원 * 1개소 = ·가로수 식재(신식) 800,000원 * 125본 = ·큰나무 공익조림 14,791,400원 * 30ha = ·숲가꾸기(육림) 1,293,000원 * 300ha =	300,000 200,000 100,000 443,742 387,900
	하천관리	·덕진천수해상습지개선사업(하천정비 L=1.8km) ·두계천수해상습지개선사업(하천정비 L=1.2km) ·신동천수해상습지개선사업(하천정비 L=5.5km) ·산곡천수해상습지개선사업(하천정비 L=0.4km) ·천동천수해예방공사(보상 및 호안정비 L=1.0km) ·화암동 299-11번지선 하천정비공사(하천정비 L=500m)	788,000 801,000 691,000 487,000 420,000 100,000
	재해재난 관 리	·수통골 소방안전도로 개설공사(도로확장 L=940m, B=8m) ·안산동 2통 교량설치공사(교량설치 L=15m, B=5m) ·자전거 이용시설 정비	500,000 100,000 200,000
	도로건설	·둔곡동 210번지 마을 진입로 정비공사 (도로정비 L=80m, B=3m, 옹벽 L=80m, H=4.5m) ·방동3통 진입로 정비(2003 특) (교량건설 L=5m, B=5m, 배수로설치 L=160m, (2×1.5)) ·구암동 443-4번지선 도로개설(L=438m, B=10m:2003특) ※총사업비950백만원(기확보500,금회300,앞으로150)	100,000 130,000 300,000

■ 명시이월사업조서

◎ 일 반 회 계

(단위:천원)

사 업 명	이월년도예산		집행년도예산	이 월 사 유
	예산현액	배정액	이월액
학하동 양수장 설치공사	350,000	350,000	350,000	실시설계 지연
노은동사무소신축 (800평)	2,060,000	2,060,000	2,060,000	절대공기 부족
온천1동사무소건립 (450평)	540,000	540,000	540,000	절대공기 부족
구암8통 마을회관 신축(건축공사비)	150,000	150,000	150,000	사업추진에 따른 공기부족
민방위교육장 현대식 시설보강	500,000	500,000	500,000	절대공기 부족
경로당 신축공사	187,000	187,000	179,262	절대공기 부족
종합복지센터 진입로 수로복개(포장)공사	200,000	200,000	200,000	절대공기 부족
관내시가지 하수도 나무뿌리 제거공사	100,000	100,000	100,000	절대공기부족
탄동천 수해상습지 개선사업	4,423,488	4,423,488	4,423,488	절대공기부족
성전천 수해상습지 개선사업	3,628,510	3,628,510	3,626,871	절대공기부족
반석천수해상습지 개선사업	4,425,311	4,425,311	4,361,782	절대공기부족

(단위:천원)

사 업 명	이월년도예산		집행년도예산	이 월 사 유
	예산현액	배정액	이월액
세동천 정비공사	100,000	100,000	100,000	절대공기부족
수통골 소방안전도로 개설공사	877,700	877,700	488,401	절대공기부족
시외곽오지지역도로 시내버스 교행장소 설치공사	1,305,552	1,305,552	1,234,955	절대공기 부족
구암동 443-4번지선 도로개설공사	500,000	500,000	494,358	절대공기 부족
문지동 하수종말처리장 오수관로 긴급보수공사	298,000	298,000	298,000	절대공기 부족

◎ 특 별 회 계

(단위:천원)

사 업 명	이월년도예산		집행년도예산	이 월 사 유
	예산현액	배정액	이월액
신성동 공영주차장 조 성	800,000	800,000	800,000	부지매입 지연
교촌지구주차장 조 성	250,000	250,000	250,000	토지구획정리사업 완료후 추진

▣ 대 덕 구 청

■ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
사회개발비	체육청소년 관 리	·송촌생활 체육공원 조성공사 ※총사업비5,000백만원,기투자1,000,금회1,000,미확보3,000	1,000,000
	보건위생관 리	·보건소 청사환경 개선공사 300,000,000원*1식=	300,000
	공원·녹지관 리	·녹색환경도시 대전 생명의 나무심기 - 열린교정 푸른숲 조성 200,000,000원*1개소= - 마을마당(쌈지공원)조성 100,000,000원*1개소= - 시민휴식공간조성 100,000,000원*1개소= - 계절별꽃이있는특화거리조성 100,000,000원*1식= ·대청댐잔디광장등 종합개발사업 ※총사업비6,706백만원,기확보4,726,금회1,341,미확보639 - 시설비 ·용전근린공원조성공사 ※총사업비2,736백만원,기투자736,금회300,미확보1,700	200,000 100,000 100,000 100,000 1,000,000 300,000
	도시개발	·남경지구 주거환경개선사업(A=44,394□) ※총사업비4,140백만원,기확보2,739,금회894,미확보507 ·신대지구 주거환경개선사업(A=77,279□) ※총사업비4,480백만원,기확보1,435,금회1,943,미확보1,102	887,864 1,936,353

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	도로건설	·오정동 223번지선 도로개설(L=120m, B=6m) ※총사업비700백만원,기확보500,금회200 ·목상동 13번지선 도로개설(L=230m, B=6-8m) ※총사업비800백만원,기확보400,금회370,미확보30 ·신탄진로자전거이용시설정비(지중화사업병행/L=2.8km) 280,000,000원*1개소= ·새일초교-상서육교간 도로확장(L=360m, B=12m) ※총사업비450백만원,기확보225,금회225 ·대전신학교∼경덕중고교간도로개설(L=290m, B=15m) ※총사업비2,500백만원,기투자500,금회500,미확보1,500	200,000 370,000 280,000 225,000 500,000

■ 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명		2003예산 (이월년도)			2004예산 (집행년도)	이 월 사 유
		예산액	집행액	잔액	2004이월예산
오정장애아동복지관 신 축		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	절대공기부족
용화사 진입로 확장 및 주차장 조성공사		165,348	30,000	135,348	135,348	토지보상협의지연으로 절대공기부족
장동선 진입로 확장공사		1,488,934	0	1,488,934	1,488,934	도시계획사업실시계획 인가 후 토지보상코자 이월
농촌생활환경 정비사업		283,915	0	283,915	283,915	토지보상 협의지연으로 절대공기 부족
장동산디민속마을조성사업	보조사업	676,000	0	676,000	676,000	개발제한구역 관리계획승인대상사업으로 관리계획승인 신청중으로 이월
	자체사업	690,000	0	690,000	690,000
신대동 회덕역앞 도로개설		450,000	4,950	445,050	445,050	보상절차 이행시기 촉박으로 절대공기 부족
대화동144번지선 도로개설		500,000	0	500,000	500,000	보상절차 이행시기 촉박으로 절대공기 부족
대전신학교∼ 경덕중고교간 도로개설		500,000	0	500,000	500,000	절대공기 부족

▣ 서  구  청

■ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
일반 행정비	청사관리	·월평2동청사 증축공사 5,500,000원*242평= ·만년동청사 증축공사 4,000,000원*61평=	1,331,000 244,000
사회개발비	체육진흥 관 리	·국민체육센타건립(국민체육공단기금2,000백만원/구비800백만원) ※총사업비48억중 `03년1억5천,`04년28억,`05년18억5천 ·청소년 여가문화시설(샘머리청소년 종합레포츠) - 청소년 종합레포츠 공간조성 공사	2,800,000 930,000
	도서관운영	·어린이전용실 조성공사 140,000,000원*1식=	140,000
	상 하 수 관 리	·하수관거 양여금 사업 - 도마동86번지선 주변 하수도시설공사 - 괴정동 백운초교 주변 하수도시설공사 - 관내일원 하수도 긴급수선공사 ·하수도 특별회계사업 - 관내일원 하수도 준설공사	200,000 120,000 296,000 100,000
	공원·녹지 관 리	·도시공원 유지관리비(정비 및 보수) ·공원내 제초공사 ·도시공원 꽃나무 식재공사(샘머리공원외 20개소) ·학교 담장 녹화(유천초교,둔산초교) ·공공기관 담장 녹화(대전선관위,정부대전청사) ·마을마당(쌈지공원) 조성(내동23-10번지외 2개소) ·건축물 옥상녹화(용문동 사회복지관)	150,000 142,000 100,000 200,000 422,000 360,000 100,000

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
사회개발비	공원·녹지관 리	·도심공간 큰나무 식재(만년동 365번지외 4개소) ·가로수 식재(신식,보식,병렬등 계백로외 3개소) ·대도로변 수림경관(방음림) 조성(갑천도시고속도로변외 2개소) ·도로변 경관개선(정림동 갑천변외 2개소) ·학교주변 환경정비(유천,둔산초교) ·마을마당(쌈지공원)조성(내동23-10번지외 2개소) ·시민휴식공간 조성(수정타운 주변외 1개소) ·도심공간 큰나무 식재(만년동 365번지외 4개소) ·대도로변 수림경관(방음림)조성(갑천도시고속도로변외 2개소) ·녹지대 유지관리비(정비 및 보수) ·공원내 화장실 개량 및 정비 ·공원내 체육시설 확충 및 정비 ·자연 및 근린공원 시설유지 관리 ·자연공원등 등산로 시설정비 ·어린이공원 시설물 유지보수 ·구봉산외 4개소 등산로 정비(특)	100,000 376,800 320,000 130,000 270,000 300,000 220,000 100,000 200,000 100,000 150,000 130,000 150,000 100,000 100,000 308,000
	노인복지	·사회단체보조금 - 가정봉사원 파견시설(원광수양원,서구노인복지관) ·경로당 신축(산직2경로당) ·경로당 증·개축(3개소) ·민간자본보조 -노인요양시설 증·개축	208,560 248,000 140,000 711,100
	도시개발관 리	·명암지구 주거환경개선사업 - 보상 및 도시기반시설공사	518,850
	지역사회 개 발	·소규모 주민생활편익사업비	1,400,000

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	산림자원 관 리	·큰나무 공익조림(20ha) ·숲가꾸기(300ha)	293,826 385,000
	치수 및 재해대책	·소하천정비사업(가진개소하천 외 1개소)	200,000
	도로건설	·자전거 이용시설 정비 ·원정동 덕골 진입로 확장 ·도로구조물 수선비 ·도로굴착복구비 ·월평동 23번지선 도로개설(특)	240,000 360,000 200,000 300,000 300,000
	도로개발	·복수지구토지구획정리사업 기반시설공사	630,000

■ 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산 (이월년도)			2004예산 (집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔액	2004이월예산
관저동사무소 신축	2,250,000	0	2,250,000	2,250,000	사업계획상`03.12월에 착공하여 `04.11월에 준공예정이나 연내 지출을 끝내지 못할것으로 예측
주민다목적종합 복지 센터 건립	600,000	0	600,000	600,000	`03.11.10 특별교부금이 교부되어 추경에 반영
보육시설신축비	143,550	0	143,550	143,550	보건복지부의 영아전담 신축위치변경에 따른 사업승인 지연
월평제2경로당 신축공사	198,000	6,500	191,500	191,500	신축부지 기부채납에 대한 일부주민의 동의거부로 공사추진 지연
원광노인전문요양 신 축	1,502,449	0	1,502,449	1,502,449	현재 운영중인 가수원동 소재 원광수양원 실비 요양시설을 매각하여 공사비 70%를 부담할 계획-> 매각되지 않아 공사추진 지연
친환경한우집산화 단지 조성 -평촌동402-8번지선 농로포장외 3건	148,000	0	148,000	148,000	제3회 추가경정예산에 반영한 사업으로 공기 부족
장안동 903번지 수해복구 공사	177,794	0	177,794	177,794	제3회 추가경정예산에 편성된 사업으로 동절기 공사중지로 공기 부족

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산 (이월년도)			2004예산 (집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔액	2004이월예산
친환경한우집산화 단지 조성 -친환경유기축사건립외 2건	664,000	0	664,000	664,000	제3회 추가경정예산 편성한 사업으로 공기부족
상공인종합지원센터설 치	500,000	0	500,000	500,000	당초 벤처빌딩을 건립코자 하였으나 시 투자심사에서 재검토 결정되어 사업계획을 변경 추진 공기부족
도마시장 공영주차장 조성	625,000	0	625,000	625,000	제4회 추가경정예산반영으로 공기부족
재래시장시설 현대화사업 (한민시장)	875,000	613,043	261,957	261,957	주차장부지의 매매협의 지연
둔원초등학교 주민휴식공간 조성	100,000	0	100,000	100,000	제4회 추경예산반영 사업으로 동절기공사 및 공기부족
흑석소로2-13호선 도로개설공사 및 보상비	782,720	239,672	543,048	543,048	도로개설공사 소유자 보상협의 부진 및 공기부족
변동근린공원조성	400,000	0	400,000	400,000	기반조성공사로서 동절기 공사지연 및 공기 부족
어린이공원 현대화사업 (우마장,안골,제비네,사정)	200,000	0	200,000	200,000	특별교부금 교부시기 지연으로 동절기 공사추진 지연
장안동 354번지선 소하천 정비공사	200,000	743	199,257	199,257	절대공기 부족

(단위 : 천원)

사 업 명	2003예산 (이월년도)			2004예산 (집행년도)	이 월 사 유
	예산액	집행액	잔액	2004이월예산
시외곽(오지)지역도로 시내버스교행장소설치	550,000	132,688	417,312	417,312	보상 및 절대공기 부족
정림동∼괴곡선골간도로확포장	500,000	21,910	478,090	478,090	보상 및 절대공기 부족
흑석동등골∼ 괴곡동 선골간 도로확포장	1,676,860	47,729	1,629,131	1,629,131	도시계획사업실시인가 및 보상추진 중
정림동 명암부락 진입로 확장	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	도시계획사업 실시계획 인가 추진중, 보상, 공기부족
월평동 25번지선 도로개설	1,000,000	10,387	989,613	989,613	도시계획사업 실시계획 인가 추진중, 보상, 공기부족
정림동226번지선 도로개설공사	100,000	0	100,000	100,000	보상협의 지연
산직동 산63번지선 수해복구공사	104,404	0	104,404	104,404	절대공기 부족

▣ 대전광역시교육청

■ 특 별 회 계

(단위 : 천원)

과 목	공 사 명	금 액
본청	·반석초 신축 ·하기초 신축 ·신계초 신축 ·교촌초 신축 ·관평초 신축 ·용산초 신축 ·봉우초 신축 부족분 (총소요액) (기확보액) 11,781,127,000원-5,576,120,000원= ·대정초 신축 부족분 (총소요액) (기확보액) 4,783,872,000원-3,398,120,000원= ·비래초 신축 부족분 (총소요액) (기확보액) 11,926,840,000원-655,397,000원= ·두리초 신축 부족분 (총소요액) (기확보액) (추후확보액) 14,775,500,000원-1,477,550,000원-10,342,850,000원= ·신선초 물가 변동분 234,562,000원*1식= ·관평중 신축 ·반석중 신축	3,118,950 3,118,950 3,445,020 519,825 502,675 438,480 6,205,007 1,385,752 11,271,443 2,955,100 234,562 418,685 5,752,860

(단위 : 천원)

과 목	공 사 명	금 액
본청	·신계중 신축 ·석봉중 신축 ·두리중 신축 부족분 (총)13,023,000,000원-(기)1,302,300,000원-(추)9,116,100,000원= ·괴정중 신축 부족분 (총)9,251,500,000원-(기)1,850,300,000원= ·장대중 신축 부족분 (총)8,104,000,000원-(기)3,352,200,000원-(추)2,725,800,000원= ·괴정고 신축 부족분 (총)9,405,500,000원-(기)940,550,000원-(추)940,550,000원= ·물가변동분 - 외국어고 599,040,000원*1식= - 지족고 335,287,000원*1식= ·사학시설지원비 - 중앙고 교사 대수선 - 동아공고 교사 수선 - 서일고 화장실 수선 45,000,000원*9실= ·대전예술고 화장실 수선 45,000,000원*3실= ·충남기계공고 기숙사A동 대수선 20,700,000원*58실= ·유성고 배수로 및 기타 ·대전체육고 본관교사동 수선 13,800,000원*22실= ·대전고 체육관 내부수선및기타 250,855,000원*1식= ·대전들꽃마을 조성공사 575,700,000원*1식=	2,876,430 3,163,680 2,604,600 7,401,200 2,026,000 7,524,400 599,040 335,287 1,173,400 340,000 405,000 135,000 1,200,600 594,004 303,600 250,855 575,700

(단위 : 천원)

과 목	공 사 명	금 액
동부교육청	·신평초 교실 증축 ·대양초 교실 증축 ·중원초 교실 증축 ·중앙초 유치원 교실 증축 ·중촌초 급식실 증축 ·옥계초 화장실 수선 45,000,000원*3실= ·신평초 화장실 수선 45,000,000원*6실= ·성남초 교사 대수선 ·화정초 교사 대수선 ·흥룡초 교사 대수선 ·문창초 교사 대수선 ·성남초 포장 ·새일초 포장 ·신평초 증축 ·대양초 증축 ·중원초 증축 ·새일초 증축 ·신탄용정초 증축 ·옥계초 증축 ·용운중 교실 증축 ·동신중 교실 증축 ·충남여중 교실 증축	575,200 359,500 287,600 284,700 371,150 135,000 270,000 870,300 828,900 1,239,750 600,300 100,000 104,000 1,097,150 332,800 1,384,750 463,000 977,150 977,150 215,700 140,900 215,700

(단위 : 천원)

과 목	공 사 명	금 액
동부교육청	·사학시설지원비 - 대성중 교사 개축 부족분 (총)3,049,650,000원-(기)1,219,860,000원= - 중앙여중 화장실 수선 45,000,000원*4.5실= - 신일여중 교사 대수선 - 경덕중 계단실 수선 69,000,000원*1.5실= ·오정중 화장실 수선 45,000,000원*4실= ·가양중 화장실 수선 45,000,000원*10실= ·신탄중앙중 교사대수선 ·동신중 증축 ·가양중 도서실 증축 부족분 (총)1,376,000,000원-(기)795,000,000원=	1,829,790 202,500 1,183,563 103,500 180,000 450,000 383,400 332,800 581,000

(단위 : 천원)

과 목	공 사 명	금 액
서부교육청	·외삼초 재건축 부족분 (총)11,093,170,000원-(기)1,096,330,000원-(추)1,652,840,000원= ·내동초 교실 증축 ·봉산초 화장실 수선 및 기타 ·도마초 교사 대수선 ·서부초 증축 ·대덕초 증축 ·유천초 증축 ·문정초 증축 ·진잠초 증축 ·금성초 증축 ·급식실 증축 및 기타 - 도마중(891□) 614,363,000원*1식= - 송강중(788□) 584,150,000원*1식= ·진잠중 교실 증축 ·사학시설지원비 - 북중 교사 대수선 - 대신중 교사 대수선 ·도마중 화장실 수선 45,000,000원*7실= ·월평중 증축 ·야영장 시설 개선 271,580,000원*1식=	8,344,000 2,742,108 557,580 1,125,900 575,200 593,300 640,100 284,700 1,356,730 1,570,550 614,363 584,150 250,200 448,800 1,166,500 315,000 977,610 271,580