2001년도 건설공사 집행계획

□대전광역시청, 각 사업소 및 각 구청

□대전광역시교육청 및 동·서부교육청

대한건설협회 대전광역시회

▣ 대전광역시

■ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
사회개발비	문화·예술	·숭현서원 복원정비 ·종합예술의 전당건립 ※총사업비 84,672, 기투자 44,716, 앞으로투자 39,956 금회투자 9,700(현금 6,700, 채무부담 3,000)	260,000 6,700,000
	체육관리	·복용승마장 마사건립공사(100칸) 500,000,000원 * 1식= ·대전월드컵경기장 건립공사 4,000,000,000원 * 1식=	500,000 4,000,000
	공원·녹지관리	·동물원진입도로 확장공사(L=1.4□, B=25m) ·추동∼비래동간 도로개설 - 공사비 2,500,000원 * 47.7a=	1,200,000 119,250
	지역개발관 리	·소규모주민숙원편익사업비(도로,환경분야등) ·동물원조성사업(도시개발공사) ※총사업비59,900백만원 (국비600,시비28,200,공사17,000,민자14,100) 시비부담내역(기투자5,548, 금회투자6,000,앞으로투자16,652)	2,000,000 6,000,000
경제개발비	농정관리	·수산물냉동창고신축 - 시설비 3,360,000,000원 * 1동=	3,360,000
	경제정책 관 리	·대전종합유통단지 진입도로공사(L=2.2□, B=15-35m)	6,207,000

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	산림자원 관 리	·둔산수목원조성 ·휴양림보완(1개소) - 시 설 비 386,000,000원 * 1개소 = ·임 도 - 신설(6□) 417,624,000원 * 90% = ·휴양림조성 - 산림욕장(1개소) 400,000,000원 * 75% =	2,500,000 386,000 375,862 300,000
	하천관리	·3대하천정비 - 갑천 하도정비(신구교-용촌철교간 L=5.2□) 퇴적토준설 200,000,000원 * 1식 = - 유등천 퇴적토준설 800,000,000원 * 1식 = - 대전천(철교-현암교)퇴적토준설 200,000,000원 * 1식 = ·지방 2급하천정비 400,000,000원 * 50% = ·소하천정비 600,000,000원 * 50% = ·하천관리(잔디포관리포함) 800,000,000원 * 50% = ·대전천 호안정비(호남철교부근, L=420m) 250,000,000원 * 50% = ·교촌토지구획정리 지구 진잠천 정비(L=474m) ※총사업비3,120백만원, 기투자700, 앞으로투자1,200	700,000 500,000 200,000 800,000 200,000 200,000 300,000 400,000 125,000 1,220,000

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	도로관리	·서부간선도로 개설공사(3공구) - 시 설 비(L=220m, B=25m) ※총사업비 17,174백만원, 기투자 8,500 ·서부외곽도로 개설공사 - 시 설 비(L=700m, B=25m) ※총사업비 24,062백만원, 기투자 16,400 ·동서로 확장공사(태평4가∼가장교) - 시 설 비(L=170m, B=25→40m) ※총사업비 9,750백만원, 기투자 4,500, 앞으로 2,750 ·동서로 확장공사(변동5가∼내동초교) - 시 설 비(L=300m, B=34→40m) ※총사업비 4,300백만원, 기투자 3,700 ·가오선확장공사 - 시 설 비(L=50m, B=25m) ※총사업비 4,950백만원, 기투자 1,830, 앞으로 1,920 ·신탄진선(산막∼대청주유소) - 시 설 비(L=1,000m, B=18→35m) ※총사업비 4,200백만원, 기투자 0, 앞으로 1,700 ·대둔산길 확장(산성동∼시계) - 시 설 비(L=990m, B=10→25m) ※총사업비 12,050백만원, 기투자 150, 앞으로 9,600 ·충무로확장 - 시 설 비 ※총사업비 1,900백만원, 기투자 1,200, 앞으로 6,000	8,674,000 7,662,000 2,500,000 600,000 1,200,000 2,500,000 2,300,000 100,000

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	도로관리	·국립현충원∼학하동간 도로개설 - 시 설 비(L=700m, B=15m) ※총사업비 31,400백만원, 기투자 2,300, 앞으로 투자 28,400 ·국립대전현충원 진입로 확장 - 1공구(유성IC-현충교 ,3□) □시 설 비(L=1.6□, B=18.5→35m) ※총사업비 16,501백만원, 기투자 9,355 - 2공구(현충교-시계, 2.5□) □시 설 비(L=800m, B=18.5→35m) ※총사업비 24,249백만원, 기투자 0, 앞으로 투자 18,549 ·봉명동 312번지선 도로확장공사 - 시 설 비(L=300m, B=12→20m) ·2002년 월드컵대비 도로시설물정비 - 도로포장(한밭대로, 신탄진로, 명정로) ·하상도로 오정무넘이다리 우회전차로설치 ·노후교량 보수. 보강 ·제1치수교 개량공사 ·동서로∼어덕마을간 도로개설	700,000 7,146,000 5,700,000 250,000 500,000 100,000 1,200,000 1,000,000 1,176,000

■ 특 별 회 계

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
사회개발비	도시관리	◑ 자치단체 자본보조 ·가양동 홍룡초등학교옆 하수시설개량(동부지구) 400,000,000원 * 1개소 * 0.5 * 0.5 = - 암 거 1,500,000원 * 180m = - 포 장 3,800,000원 * 16.2a = - L형 하수도 210,000원 * 328m = ·유성구 구암동 방송통신대앞 도로확장(유성2지구) 2,000,000원 * 150m = ·유성시가지 하수도개량(U자형 하수도) 100,000원 * 2,500m =	400,440 270,000 61,560 68,880 300,000 250,000
경제개발비	도시교통사 업	·공영주차장건설사업보조(동구) 400,000,000원 * 1개소 * 0.5 * 0.5 =	1,000,000
	산업단지 조 성	·제4산업단지 폐기물매립장 조성 - 시 설 비 457,294원 * 14,916□ = ·과학산업단지 조성 - 조 성 비 100,000원 * 276,000평 * 30/100 =	6,820,998 8,280,000
	지 하 철 건설지원	·1호선1단계구간 건설공사비 (건설1과) 1-1공구(판암차량기지) 55,501,000,000원 * 7.21% = 1-2공구 83,371,000,000원 * 13.19% = 1-3공구 68,511,000,000원 * 4.38% =	78,706,800 33,000,000 4,000,000 11,000,000 3,000,000

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	도시관리	1-4공구 73,098,000,000원 * 13.68% = 1-5공구 33,403,000,000원 * 14.97% = (건설2과) 1-6공구 94,508,000,000원 * 19.89% = 1-7공구 85,489,000,000원 * 21.64% = (조사설계과) 1-10공구 67,840,000,000원 * 4.42% = 1-11공구 59,746,000,000원 * 8.37% = (건축과) 종합사령실건립공사 27,784,000,000원 * 1.46% = ·1호선2단계구간 건설공사 (조사설계과) 1-12∼21공구 287,180,000,000원 * 13.93% =	10,000,000 5,000,000 37,300,000 18,800,000 18,500,000 8,000,000 3,000,000 5,000,000 406,800 40,032,000

▣ 중  구  청

■ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
사회개발비	청소년운영	·청소년 문화의 집 조성	150,000
	하수관리	·유천동 유천시장주변(L=320m, 2.0*1.5) ·대흥동 대전코아주변(L=200m, □=900) ·유천동 210번지선 하수도준설(L=600m) ·하수도시설물 준설 및 소규모수선(L=420□)	250,000 150,000 130,000 200,000
	주택사업	·청사증축 및 대수선	2,000,000
	도시계획관 리	·뿌리공원광역화 사업	100,000
	도시개발	·주거환경개선사업 - 용두1지구 도로개설(L=530m, B=8-12m) - 중촌지구 다목적복지회관 건립공사(A=500□) - 부사2지구 도로개설(L=170m, B=12m) - 문화2지구 도로개설(L=140m, B=15m) - 목동2지구 도로개설(L=100m, B=6m) - 대사2지구 도로개설(L=200m, B=6-8m)	780,000 550,000 190,000 100,000 100,000 100,000
	산림자원관 리	·소규모 주민생활 편익사업(도로,주택가 환경정비등) ·경관조림 ·임도신설(신규 2.0□)	749,950 117,635 132,959
경제개발비	하천관리	·대전천(지방1급하천) 호안정비(L=420m) ·정생천(지방2급하천) 정비(L=250m)	248,212 139,000
	도로건설	·대사동 220-5번지선 도로개설(L=220m, B=6m) ·문창동 47번지선 도로개설(L=70m, B=6m) ·도로굴착복구	297,840 198,560 500,000

(단위:천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	도로건설	·목동 34-1번지선 도로개설(L=90m, B=6m) ·대흥동 남부장로교회 도로개설(L=110m, B=6m) ·옥계동 164번지선 도로개설(L=160m, B=6m) ·대사동 134번지선 도로개설(L=50m, B=8m) ·부사동 292번지선 도로개설(L=100m, B=6m) ·오류동 음식특화거리 포장정비공사(L=1,668m, B=6-10m) ·오류동 192번지선 도로개설(L=21m, B=4m) ·청남빌라옆 도로개설(L=130m, B=8m)	200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 100,000 110,000 200,000

■ 특 별 회 계

(단위 : 천원)

사 업 명	금 액
◎사정지구토지구획정리사업 □시 설 비 ·공사비(1차년분) 토 공 (1식) 배 수 공 (1식) 상수도공 (1식) 구조물공 (1식) 부 대 공 (1식)	3,300,000 1,200,000 800,000 300,000 500,000 500,000

■ 계속비사업조서

◎ 일 반 회 계

(단위:백만원)

사 업 명	구 분	총 액	연 차 별 계 획
			□99년이전	2000	2001년	2002년이후
용두1지구 주거환경개선사업	기 정	9,873	6,572	2,000	1,301
	수 정	11,200	6,536	1,562	3,102

▣ 동  구  청

■ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
사회개발비	체육·청소년	·생활체육관 건립(실시설계비 포함) ※총사업비 15억5천만원중 기확보11억5천만원(부지2,182□, 건물1,157□)	400,000
	하수관리	·성남1동 508번지선 하수도 시설공사(L=700m) ·가양1동 531번지선 하수도 정비공사(L=280m) ·신흥초교주변 하수도 시설공사(L=250m) ·비룡동 동신고교앞 배수 시설공사(L=250m)	198,570 99,285 99,285 99,285
	공원·녹지	·생활권 경관 조성(10□)	116,794
	노인복지	·경로당 증축 및 보수(4개소)	158,856
	지적관리	·소규모주민숙원사업비	1,000,000
경제개발비	산 림 자원관리	·사방댐 건설 157,162,000원 * 1개소 = ·산림욕장 조성 384,209,000원 * 1개소 = ·임도 신설 66,415,500원 * 2□ =	157,162 384,209 132,831
	하천·재해대책	·가도교 시설개량 및 무인시스템 설치(3개소) ·지방2급하천 정비(L=200m)	148,927 158,856
	도로관리	·주민숙원사업(도로개설 및 확장) -천동 75-68번지 도로개설 (L=130m B=8m) -제1치수교-신흥교간 도로개설 (L=40m B=15m) -판암1동 309번지선 도로개설 (L=35m B=8m) -가양1동 12-13통간 도로개설 (L=70m B=6~8m) -성남1동 177번지선 도로개설 (L=70m B=8m) ·도로굴착복구비	1,578,331 490,310 197,460 197,460 295,961 397,140 500,000

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
경제개발비	도로관리	·소제동 306-1번지선 도로개설 (L=52m B=15m) ·성남2동 66번지선 도로개설 (L=110m B=6~8m) ·판암2동 535-23번지선 도로개설 (L=70m B=6m) ·성남2동 3번지선 도로개설(신) (L=50m B=6m) ·철갑교외 10개소 교량보수 보강공사(교량 균열부) ·대전여고-한밭여중간 도로개설 (L=132m B=6m) ·성남2동 70번지선 도로개설 (L=162m B=8m) ·홍도동 99번지선 도로개설 (L=30m B=6~8m) ·성남1동 현대오피스텔 뒤 도로개설 (L=15m B=8m)	150,000 100,000 100,000 100,000 160,000 250,000 100,000 100,000 100,000

■ 특 별 회 계

(단위 : 천원)

사 업 명	금 액
◎주거환경개선사업 □성남1지구사업 ·소로 4-49호선 도로개설(L=35m, B=4m) ·소로 4-50호선 도로개설(L=29m B=4m) □성남2지구사업 ·소로 4-1호선 도로개설(L=78m, B=4m) ·소로 4-20호선 도로개설(L=74m B=4m) □용운지구사업 ·중로 2-22호선 확장(L=90m, B=8m)	201,000 111,000 90,000 330,000 200,000 130,000 100,000 100,000
◎토지구획정리사업 □흥룡초등학교앞 하수도개량공사 (암거180m, 포장복구 16.2a, U형하수도 328m) □낭월지구 ※계속사업:총소요액12,778,000천원(2개년간) -기반시설공사비 □용운지구 ·기반시설공사 ※계속사업:총소요액7,500,000천원(3개년간)	397,577 6,389,000 1,000,000

■ 명시이월사업

◎ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	이월액	이 월 사 유
·문화정보관청사대수선 및 분실방지시스템구축시설비	385,000	381,370	·제3회추경에 편성되어 설계, 입찰공 고 후 전기, 통신, 건축수선등 공정별 추진으로 공기부족
·가양1동 합숙경로당 신축	298,620	194,580	·부지추가매입,설계용역후 2000.11.21 공사게약을 체결하였으나 공사기간 90일로 공기부족
·성남1동 만수경로당 신축	99,140	95,940	·신축부지옆 도로확보를 위한 도시계 획선형변경으로 사업추진이 늦어져 200.11.21.설계용역의뢰하므로써 년내 사업완료가 어려움
·아동복지시설 신축 (효광원 직업훈련실)	963,480	782,902	·공사기간이 최소150일이상 소요되나 국시비가 2000.9.21.교부되어 공사착 공이 지연되어 년내 완공어려움
·신안가도교가압펌푸장 시설	658,591	547,061	·용역설계, 시설계심사 및 입찰 기간 등으로 70일정도가 소요되어 8.28착 공하였으나 공사기간이 150일로 년내 사업완료가 어려움
·홍도동93-2번지선 도로개설공사	298,122	186,772	·토지소유자1인이 편입용지외에 무리 한 잔여지 매수요청으로 보상협의가 지연되고 있음 -2000.4.4보상금 지급통보
·성남1동177번지선 도로개설공사	298,122	136,785	·보상대상자 14인이 보상가 불만으로 보상협의에 응하지 않고 있어 지연되 고 있음-2000.10.28보상금 지급통보

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	이월액	이 월 사 유
·가양1동 342-1번지선 도로개설공사	248,434	248,195	·보상대상자1인이 자기집을 우회할수 있도록 도시계획선변경을 요구하고 있고 ·일부의 주민이 보상가가 적다는이유로 협의에 불응하고 있어 추진이 지연 되 고 있음 - 2000.10.18.보상금 지급통보
·판암동 687-38번지선 도로개설공사	198,748	198,748	·당초예산에 편성된 1차발주공사(사업 비5억)가 2000년7월발주, 금년12월말 준공예정으로 본공사는 연계공사로써 동시발주가 어려워 1차구간완공후 연 계시공을 위하여 2회추경에 편성된 2 억원과 4회추경에 편성된 2억원의 이 월이 불가피함
·판암동 687-38번지선 도로개설공사(특정)	198,560	198,560
·소제동 299-521번지선 도로개설공사	298,122	298,122	·보상대상자 일부가 도시계획선변경을 요구하고 보상에 응하지 않고 있음 -2001년 사업인가 및 수용재결 후 사 업추진게획임
·대전여고-한밭여중간 도로개설공사	180,000	180,000	·양교의 경계(운동장)를 통과하는 도 로로 일부만 추진시 학교교육에 지장 을 초래하므로 나머지 사업비 확보 후 일괄보상한 후 공사를 추진함이 불가피함
·판암2동 498-12번지 도로개설공사	150,000	117,880	·주변주민들이 자연경관훼손등의 이유 로 선형변경을 요구하고 있어 지역민 과합의점도출을 위한 협의를 계속하 고 있음

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	이월액	이 월 사 유
·천동9-10통간도로개설공사 (특정포함)	189,071	116,032	·당초편성분중일부는 편입토지에 대한 소유자사망으로 인한 미상속으로 보 상협의가 지연되고 있으며 ·3차추경분은 추진기간이 180일이상이 소요되어 년내추진이 어려움
·성남육교-성남초교간 도로개설공사(특정)	496,426	152,558	·편입토지 및 물건소유자 1인이 보상 가가 적다는 이유로 협의에 불응하 고 있어 보상이 지연되고 있음 -2000.8.31.보상금 지급통보
·성남동 현대오피스텔 뒤 도로개설공사(특정)	198,560	198,560	·제4회추경예산편성으로 사업추진 공기부족
·효동4가-인단산간 도로개설공사(특정)	297,851	286,251	·공사우선시행과 보상에 대하여 주민 의견이 분분하여 의견통합을 위하여 추진이 지연되었으며 ·2000.11월초 합의점을 도출하여 정 상추진되고 있으나 년내에 추진이 어려움
·문창교상류무넘이다리 설치공사(특정)	168,785	168,785	·사업추진을 위해서는 240일이상소요 되나 제3회추경에 편성되어 추진 공 기가 부족함
·청소년수련시설특성화사업	200,000	200,000	·특성화사업설치예정부지를 기부키로한 토지소유자가 토지분할등 행정절차 이행지연으로 사업추진이 늦어지고 있어 소유권이전 후 추진계획임

◎ 특 별 회 계

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	이월액	이 월 사 유
·성남2지구소로4-5호선 도로개설공사(특정포함)	230,000	230,000	·보상가 불만에 따른 보상협의지연으로 사업추진 공기부족
·성남1지구소로2-11호선 도로개설공사	520,000	520,000	·도로개설계획도로와 현지반도로와의 단차가 심해 주변건물안정성등 현지 여건검토로 사업추진 공기부족
·성남1지구소로4-48호선 도로개설공사	160,000	160,000	·보상가 불만에 따른 보상협의지연으로 사업추진 공기부족

▣ 유성구청

■ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
사회개발비	문화·예술	·하기동 복지회관 옹벽공사 및 마루바닥 정비	100,000
	하수관리	·하수관거 정비사업 ※총사업비1,918백만원,기투자 632백만원, 앞으로 1,286백만원	632,000
	노인복지	·전민동 경로당 신축공사 4,000,000원 * 50평 = ·유성구 복지관 4,000,000원 * 100평 =	200,000 400,000
	지역개발 관 리	·소규모 주민생활편익사업 ·민원불편 신고사항 해결 사업비(구민운동장)	500,000 1,000,000
경제개발비	농정관리	·송정동 농로포장공사(L=600m)	100,000
	산림·녹지 관 리	·임도(신설) 69,604,000원 * 2□ =	139,208
	하천관리	·세동천 정비공사(L=300m) ·잔디포관리 및 하천시설물 관리 (A=335,033□)	198,800 178,800
	도로건설	·구암 6,7,13통간 도로개설공사(L=200m, B=10m) ·성북동 산림욕장 진입로 확장공사(L=200m, B=10m) ·전민∼관평간 도로확장공사(L=350m, B=10m)	199,000 199,000 248,000

■ 특 별 회 계

(단위 : 천원)

사 업 명	금 액
□교촌 토지구획정리사업지구 진잠천 정비 □교촌 토지구획정리사업 ※총사업비 18,642백만원, 기투자 7,303백만원, 앞으로 투자 6,466백만원 □경제기반시설 및 쓰레기 처리공사 □궁동 공영주차장 조성사업	1,220,000 4,873,000 1,100,000 415,000

■ 계속비사업조서

(단위 : 천원)

사업명	사 업 개 요	구분	예산총액	기 투 자			년차별계획액			사 유
				98	99	2000	2001	2002	2003
유성올림픽 스포츠센타 건 립	지하1층 지하2층	기정	(기3,000,000) 7,323,590	327,450	900,000	(기900,000) 1,100,000	(기900,000) 2,200,000	(기1,200,000) 2,796,140		건립규모 축소 및 건립기간 조정 【사업비내역】 ·실시설계비 : 356,450 ·시설비 : 3,910,000 ·감리비 : 70,385 ·부대비 : 10,615
		수정	(기3,000,000) 4,347,450	327,450	900,000	(기900,000) 1,020,000	(기2,100,000) 2,100,000

■ 2000 명시이월사업

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
·장대동 경로당 신축공사	106,000	106,000	·공기부족
·죽동 26-1번지선 하수도공사	120,000	120,000	·구비부담 지연반영
·안상천 수해상습지 개선사업	2,977,000	2,977,000	·구비부담 지연반영
·유성IC만남의 광장 화장실 설치공사	203,400	203,400	·공기지연
·신성동 공영주차장 조성	1,293,974	1,293,974	·공기지연
·국토공원화 시범 공원 조성	350,000	350,000	·시비보조에 따른 구비부담 지연반영
·국궁장 건립	260,000	260,000	·건립부지 확보지연
·진잠다목적 체육관 증축	1,000,000	1,000,000	·실시설계 공기부족
·노인전문요양 시설 증축	722,040	722,040	·국·시비 교부결정 지연으로 공기부족
·방동 1통 마을회관 신축공사	150,500	150,500	·총건립예산 부족에 따른 발주지연

▣ 대덕구청

■ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
일반행정비	민원봉사실	·민원실환경개선	150,000
사회개발비	청소년 운 영	·청소년문화의집 조성	173,000
	상하수도관리	·오정동 445번지 하수도 시설공사 (L=1,000m) ·중리동 410번지선 하수도 시설공사 (L=2,000m) ·오정동 화정초등학교 주변 하수시설공사 (L=1,000m) ※총사업비 300백만원, 금회 145, 미확보 155 ·관내 하수도 긴급보수공사 ·금병로변 하수도 시설공사 (암거 L=550m) ※총사업비1,000백만원, 기확보300, 금회100, 미확보600	200,000 200,000 145,000 100,000 100,000
	공 원· 녹지관리	·법동소류지생태공원조성 ※총사업비 1,250백만원, 기투자 580 ·용전근린공원 조성	670,000 150,000
	건 축· 주택관리	·신탄진도서관 건립 ※총사업비7,653백만원,기확보2,260,금회200,미확보5,193	200,000
	지적관리	·소규모주민생활편익사업비	500,000
경제개발비	농정관리	·농용수로개보수 (L=110M) 110,000,000원 * 1개소 =	110,000
	안전관리	·산디천 정비(L=400m)	200,000
	도로건설	·목상동 동원(아)∼금병로간 도로개설(도로개설L=263M, B=8M) ※총사업비600백만원, 기투자300, 금회300 ·연축12통 마을진입도로개설(L=260M, B=10M) ※총사업비1,000백만원, 금회300, 미확보700	300,000 300,000

■ `99 명시이월사업

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
·금병로변하수도 시설공사	300,000	300,000	총사업비10억원중 보조사업비 등 재원확보후 사업추진
·용호천수해상습지개선사업	1,160,000	1,160,000	대전광역시에서 실시설계용역중(2000. 5.8∼12.14)으로 편입토지 미보상
·오정∼대화동간 도로개설	900,000	900,000	토지보상 및 문화재조사에 따른 절차이행등으로 공사 미착공
·오정동대성자동차학원 주변도로개설	300,000	300,000	도시계획변경절차진행중으로 선 보상후 사업추진
·오정동223-221번지선 도로개설	150,000	150,000	2000.10.31일 특정교부금이 교부결정되어 절대공기부족
·연축동12통∼임도간 도로개설	100,000	100,000	2000.10.31일 특정교부금이 교부결정되어 절대공기부족
·신탄진도서관 건립	1,200,456	1,200,456	기본 및 실시설계 장기소요에 따른 공기부족으로 설계용역후 사업추진

▣ 서  구  청

■ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

과 목		공 사 명	금 액
사회개발비	체육진흥 관 리	·다목적체육관 건립	920,000
	상 하 수 관 리	·하수관거 양여금 사업 - 만년중학교 주변 하수관 정비공사 (□=300∼600m/m, L=6,000m) - 문정초등학교 주변 하수관 정비공사 (□=300∼600m/m, L=4,000m)	300,000 200,000
	도시개발	·구청사 신축 ·가장동사무소 증축	1,915,000 420,000
	지역사회 개 발	·소규모 주민생활편익사업비	500,000
경제개발비	산 림 자원관리	·도로변 꽃길조성(2ha) ·하천관리 ·지방 2급 하천정비(L=250m)	142,858 210,000 100,000
	재해대책	·가진개소하천 정비공사 (L=250m)	200,000
	도로건설	·정림우성(아)∼흑석개간 도로확포장공사 ·도로굴착복구비 - 굴착복구비 - 관내 자전거도로정비공사 ·도로구조물 수선비 ·도로포장 유지관리비 ·학교통학로 보도설치 ·정림동 231번지선 도로개설(L=230m, B=8m)	400,000 1,000,000 587,000 413,000 100,000 100,000 110,000 140,000

■ 특 별 회 계

(단위 : 천원)

사 업 명	금 액
□흑석지구 토지구획정리사업 기반시설공사 ·총 소 요 액 : 3,201,670천원 - 2000까지 : 1,821,000천원 - 2001계획 : 1,380,670천원	1,380,670
□복수지구 토지구획정리사업 기반시설공사 ·총 소 요 액 : 17,008백만원 - 2000까지 : 3,163백만원 - 2001계획 : 7,210백만원 - 2002이후 : 6,635백만원	7,210,000

■ 계속비 사업조서

(단위 : 백만원)

사 업 명	구분	총액	년 차 별 계 획					비 고
			`99 이전	2000	2001	2002	2003
용문종합사회복지관 신 축 공 사 (건물연면적:604평)	기정	3,003	830	1,700	473			·건 축 비 : 2,462 ·부지매입비 : 1,123
	수정	3,585	830	1,140	1,241	374
남선공원빙상장건립 (건물연면적:3,630평)	기정	19,946	12,842	7,104				·시 설 비 : 18,800 ·감 리 비 : 1,113 ·부 대 비 : 33 ·기초조사 및 용역비:530
	수정	20,476	13,372	1,500	2,000	3,604

▣ 대전광역시교육청

■ 특 별 회 계

(단위 : 천원)

과 목	공 사 명	금 액
본청	·대전서붕고 교사신축 ·대전노은고 교사신축 ·서일고 다목적 강당 860,000,000원 * 1식 = ·동신고 교사증축(제7차 교육과정) ·한밭고 교사증축(제7차 교육과정) ·대전체육고 육상트랙 조성 ·동신고 진입로 시설 ·유성여고 교사 대수선 ·대성여자정보과학고 교사대수선 ·한빛고 교사 대수선 ·새일고 교사 대수선 ·화장실 개선 및 기타공사 - 서일여고 - 대전북고 - 보문고 - 서대전여고 - 신일여고 ·노후시설개선 - 동아공고 ·대덕고 교사대수선 ·유성고 교사대수선 ·한밭고 교사대수선	6,527,940 2,854,260 860,000 1,981,100 910,500 1,606,480 153,150 376,800 671,900 343,463 447,100 471,900 166,890 374,500 222,750 214,800 157,488 1,029,300 610,500 607,200

(단위 : 천원)

과 목	공 사 명	금 액
본청	·대전체육고 교사대수선 ·충남기계공고 실습동 대수선 ·신탄진고 화장실 개선 및 기타공사 ·혜광학교 증축 ·대전교육연수원 비탈면 보강공사 ·대전학생도서관 화장실 수선공사	104,000 1,549,313 273,800 911,300 270,000 121,500

(단위 : 천원)

과 목	공 사 명	금 액
동부교육청	·송촌초 증축 ·법동초 증축 ·천동초 증축 ·산내초 증축 ·산성초 증축 ·성남초 증축 ·산성초 증축 부족액(제7차 교육과정 시설비) ·산내초 증축 부족액(제7차 교육과정 시설비) ·회덕초 화장실 수선 40,500,000원 * 3실 = ·산내초 교사개축 ·산성초 교사개축 ·화정초 대수선 및 기타공사 ·보운초 대수선 및 기타공사 ·회덕초 외부환경개선 ·동산중 화장실 증축 및 기타공사 ·신탄중앙중 교실증축 ·충남중 다목적체육관 신축 ·동명중 옹벽공사 600,000원 * 250m= ·신탄진중앙중 교사개축 ·충남중 교사개축 ·오정중 외부환경 개선 ·용운중 외부환경 개선 ·문화여중 외부환경 개선 ·대전여중 외부환경 개선	609,080 358,800 767,600 1,292,400 381,100 403,400 1,208,050 826,950 121,500 2,739,050 3,080,300 666,800 494,200 115,000 332,361 221,100 660,000 150,000 1,002,700 233,761 167,000 116,400 125,000 118,000

(단위 : 천원)

과 목	공 사 명	금 액
서부교육청	·노은초 신축 ·장대초 신축 ·지족초 신축 ·진잠초 증축 ·금성초 증축 ·둔원초 증축 ·가수원초 증축 ·신봉초 ·갈마초 급식실 확충공사 300,000,000원 * 1식 = ·복수초 화장실 수선공사 40,500,000원 * 8실 = ·백운초 화장실 수선공사 40,500,000원 * 6실 = ·노은중 신축 ·송강중 증축 ·남선중 증축 ·진잠중 증축(제7차 교육과정 시설비) ·가수원중 대수선공사 ·대전서중 대수선공사 ·봉산중 대수선공사 ·변동중 대수선공사 ·버드내중 대수선공사	6,543,000 5,015,000 5,619,000 1,093,400 712,300 1,204,600 451,200 1,544,200 300,000 324,000 243,000 6,362,480 752,000 655,600 981,400 367,500 400,800 390,000 393,680 150,000